투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[설계변경 실정보고 승인(조건부) 통보(시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사)]

1. 업무지시현장: 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사 (주)성보전기, 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2. 작 성 일 자: 2020-10-19 10:10:22

3. 지 시 내 용

가. PC20(동대문 실버케어)-384(2020.10.7.)호와 관련입니다.

나. 「시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사」와 관련하여 3~4층 요양실내 바닥난방 설비 반영을 위한 설계변경 실정보고에 대해 검토한 결과 보고사항이 적정한 것으로 판단되며,

다. 설계변경 금액이 50백만원을 초과하므로 우리부 설계변경 소위원회 심의 후 결과를 반영하는 조건으로 승인통보 하오니 심의자료를 작성하여 제출하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							김문호			환경설비과장					10/19 김오열
협조자
시행			설비부-15898									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15층 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8621						/전송			02-3708-8659					/													/	부분공개(5)