문서번호	급수운영과-17328
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김초민		김승완	10/20 이병운
협 조

설계변경 심의 결과보고(공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사)

설계변경 심의 결과보고

【공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사】

2020. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

【공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사】

□ 설계변경 심의회 개최 현황

○ 일  시 : 2020년 10월 20일(화)

○ 장  소 : 전자결재 서면심의

○ 위  원 : 위원장(급수운영과장)외 5명

○ 안  건 : 공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관 설치공사 설계변경 적정성 심의

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명 : 공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관 설치공사

○ 공사개요 : 당초– D=15~25mm, L=223m,  변경 – D=15~25mm, L=315m

○ 계 약 일 : 2020.08.13.

○ 공사기간 : 2019.08.24. ~ 2020.12.21.

○ 계약금액 :**************************************************

○ 계약상대자 : ***************

□ 설계변경 심의 결과

○ 설계변경 사유

- 현장여건 변화에 따른 예정물량 증ㆍ감

- 4개소 취소 및 1개소 추가 시공 발생

○ 보험료 사후정산 반영 : 근거자료(납입확인서 등) 미제출에 따른 감액

- 국민건강보험료 : 감 219,837원

- 국민연금보험료 : 감 296,632원

- 노인장기요양보험료 : 감 22,533원

○ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당초계약금액	설계변경금액	비 고
도 급 액	***********	***********	************

○ 내역서 검토사항(단가적용)

- 일반행거외 27공종 물량, STS관외 24개 자재 물량 증ㆍ감

○ 설계변경 심의위원회 심의결과

- 본공사의 시공물량 증ㆍ감에 대한 변경 사항 설계변경은 타당함

□ 조치의견

○ 상기와 같이 시공물량 증․감 품목에 대하여 사업소 자체심의위원회 개최결과 타당함에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 행정지원과에 계약 의뢰코자 합니다.

붙 임 : 1.심의위원회 개최 계획 보고 1부.

2.심의위원회 설계변경 심의 결과서 1부.

3.설계변경내역서 1부. 끝.