문서번호	공원조성과-12948
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생활공원팀장	공원조성과장
김현이		박미성	10/20 유영봉
협조	공원구역정책팀장		박철수
	공원보상지원팀장		代송휘영

- 2019년 장기미집행 도시공원 보상사업(불암산-노원) -

누락지장물 보상비 등 예산확보 및 재배정 검토보고

2020. 10.

푸른도시국

(공원조성과)

- ’19년 장기미집행 도시공원 보상사업(불암산-노원) -

누락지장물 보상비 등 예산확보 및 재배정 검토보고

『2019년 장기미집행 도시공원 보상사업(불암산도시자연공원-노원)』추진 관련, 누락지장물 감정평가를 완료하고 예산 재배정 요청사항에 대하여 검토보고 드림

□ 관련문서

❍ 2019년 장기미집행 도시공원 보상사업 추진계획 [공원조성과-755(’19.1.21)호]

❍ 누락지장물 보상비 재배정 요청 [노원구 푸른도시과-21817(’20.10.5.)호]

□ 2019년 사업계획

****************************************************

**************************************

**********************************************************

********************************************************

(기준: ’20.10.20./단위: 천원)

총사업비 (A=B+F)	재배정액(B)			부족분예산 (F)	비 고
	소계 (B=C+D)	’19년 명시이월(C)	’20년 본에산(D)
**********	**********	*********	*********	******	*********************

******************************************************

□ 추진경위

❍ ’77.07.09.: 도시계획시설(공원) 결정(건설부고시 제138호)

❍ ’19.08.29.: 불암산도시자연공원 조성계획 결정(변경)(서고 제2019-283호)

❍ ’19.01.21.: ’19년 장기미집행 도시공원 보상사업 계획 통보

❍ ’19.05.09.: 측량수수료 재배정 요청

❍ ’19.10.24.: 실시계획(변경) 인가고시(노원구고시 제2019-121호)

- 중계동 산30-20 등 20필지, 토지(17,215㎡) 및 지장물 보상 등 공원조성

❍ ’19.12.19.: 보상열람공고

❍ ’20.04.08.: 측량수수료(이지목 측량) 재배정(이지목 측량비 5,231천원)

❍ ’20.06.08.: 보상비(토지, 물건, 영업권 보상 및 감평수수료) 재배정 요청

- 보상비 10,841,096,080원(토지, 물건, 영업권)/감평수수료 19,223,600원

- 당초 보상비(공시지가×3배) 보다 2배 이상인 중계동 산30-20 등 6필지 재검증 의뢰

❍ ’20.06.15.: 보상비(4,905,781천원) 재배정 ※ 부족분 예산 ′20년 예산 활용

- 재배정 내역 4,905,781천원(토지 14, 물건, 영업권, 감평수수료)

❍ ’20.07.07.: 측량수수료(누락지장물) 재배정 완료(5,313천원)

❍ ’20.09.01.: 보상비(감정평가 재검증에 따른 보상비) 재배정 완료

- 보상비 재배정 5,149,328천원(’20년 예산 재배정)

❍ ’20.10.05.: 누락지장물(보상비 및 감평수수료) 재배정 요청(74,712원)

□ (금회) 재배정 요청사항

❍ 요청사항: 누락지장물 보상비(분묘 및 비석 등) 및 감평수수료 금74,712천원 재배정 요청

❍ 요 청 액: 금74,712천원

- (물건)보상비: 73,866,660원

(단위: 원)

연번	위 치	물건의 종류	구조 및 종류	수량	감정평가액	비 고
*					**********
*	*******	****	**	**	*********	*********************
*		****	**	**	**********
*		****	**	**	*********
*		**	*****************	**	*********
*		**	*****************	**
*		**	*************	**
*		**	*************	**
*		****	*	***	**********

- 감평수수료: 금844,800원

(단위: 원)

구 분	합 계	㈜태백 감정평가법인	㈜대한 감정평가법인	㈜태양 감정평가법인	비 고
감정평수수료	844,800	281,600	281,600	281,600

□ 예산확보 및 재배정 계획

**********************************************************************************************************************************

(기준: 20.10.20./단위: 천원)

사 업 명		예산액 (당초예산)	기 배정액	금 회 배정액	배정잔액	비 고
******************** ***************		**********	**********	******	*	***
********************************		**********	**********	******	*********	** **
	*** ***********	********* ***********	*********	******	*	********
*************************		***********	***********	*	***********	*** ***
	*** ***********	*********	*********	*	*

********************************************************

❍ 예산과목: (’19년 명시이월) 생활권 공원확충, 미집행 공원조성, 장기미집행 도시공원 보상사업(도시자연공원, 강북), 시설비 및 부대비, 시설비

□ 검토결과

**************************************************************************

****************************************************************************************************

□ 향후계획

❍ 예산 재배정(서울시 → 노원구)

❍ 예산 집행(노원구)

붙임 : 1. 예산 재배정 요청 공문 및 자료 일체 각 1부.

2. ’19년 장기미집행 도시공원 보상사업(이월) 지출부 1부.  끝.