문서번호	토목부-20170
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		代최승룡	10/20 김용제
협조

암판정에 따른 가시설 공사비 변경 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사]

2020. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

암판정에 따른 가시설 공사비 변경 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사]

차고지(저류조 포함) 굴착 공사중 암판정 결과에 따른 암반선 및 암질 변경으로 흙막이가시설 파일 천공 길이 및 지보재가 변경되어 이에따른 공사비 변경이 필요하여 검토 보고 드림.

※ 도급비 : 당초 2,600백만원 ⇒ 변경 2,565백만원 (감35백만원)

Ⅰ		관 련 근 거

○ 신림차고지(감) 제2020-190호('20. 10. 13.) : 암판정 결과에 따른 가시설 공사비 변경

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2 일원

○ 규    모

- 주 차 장 : 버스 101대 (지상, 지하1층)

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하2층)

○ 공사기간 : 2018. 10. 01.~2021. 09. 29.(2차 ‘19.12.20.~’20.12.31.)

○ 도 급 비 : 33,579백만원(2차 6,000백만원)

○ 시 공 사 : 삼영종합건설㈜ 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 굴착 공사중 암판정위원회 암판정 결과를 반영한 암반선 및 암질 변경으로 흙막이가시설 파일 천공(퇴적층, 풍화토, 연암, 보통암, 경암) 길이 및  지보재(토류판, 어스앙카, 숏크리트, 락볼트) 수량 변경으로 정산이 필요함.

○ 암반선 변경 현황

○ 흙막이가시설 수량 증·감 현황

- H-pile 천공 길이 변경사항

구 분	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
토 사	m	895	727	감168
풍화암	m	163	214	증51
연 암	m	1,983	1,434	감549
경 암	m	530	1,234	증704
계	m	3,571	3,609	증38	강남순환도로 보강토옹벽 네일링 간섭구간 추가 시공 38m

- 지보재 등 변경 사항

구 분	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
토류판	㎡	1,795	1,724	감71
숏크리트	㎡	3,206	3,376	증170
어스앙카	공	444	374	감70
락볼트	조	948	980	증32

○ 공사비 증·감 현황

(금액단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	1,760,146	1,750,610	감9,536
제 경 비	840,054	814,590	감25,464
총 공 사 비	2,600,200	2,565,200	감35,000

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기와 같이 암반선 확인후 암석 강도에 따라 파일 천공 및 지보재 설치를 시행 한 사항으로 변경 수량과 공사비는 적정함으로 추후 설계변경시 내역에 반영하고자 합니다.

붙임 : 감리단 검토의견서 및 내역서 1부.  끝.