투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	공사 변경계약 의뢰 (양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사)

1. 설비부-15763(2020.10.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인「양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사」에 대한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사

나. 도 급 비 : 238백만원

다. 도 급 사 : ㈜다원종합전설

라. 변경사유

- 선행공정(상수도관 이설) 지연에 따른 가로등 이설 전기공사 공기 연장

마. 변경계약 의뢰 내용

구 분	계 약 금 액(원)			계 약 기 간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
	***********	***********	변경없음	************ ***********	************ ***********

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	양성옥		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	10/19 이달영
협조자
시행	설비부-15962	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송		/	imok90@seoul.go.kr	/	부분공개(5)