문서번호	토목부-20104
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
최돈용	김동현	10/19 김용제
협 조

『노들로 구조개선 기본 및 실시설계용역』

준공기한 연기 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『노들로 구조개선 기본 및 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토보고

“노들로 구조개선 기본 및 실시설계 용역” 준공기한 연기요청에 대한 검토보고임

1	관련근거

○ 동기공 2020-5530(2020.10.15.)호, 과업기간 연장요청 건

2	용역개요

○ 용 역 명 : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계

○ 규    모 : 연장 L=8.5㎞, 폭 B=17.5 ～ 41m(왕복 4～8차로)

- 8차로 구간 : 양화교 ～ 양화대교 남단(B=41m)

- 4차로 구간 : 양화대교 남단 ～ 한강대교 남단(B=17.5m)

○ 용역기간 : 2019. 04. 22. ∼ 2020. 10. 31.

○ 도 급 액 : 379,470,000원

○ 용 역 사 : ㈜동명기술공단, ㈜도화엔지니어링, ㈜동희이앤씨

3	추진경위

○ ‘19.04.22. : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘19.05.15. : 기본 및 실시설계 용역 착수보고

○ ‘19.05. ∼ 06. :　합동 현장조사(1~3차) 및 노선검토 보고

○ ‘19.07. ∼ 08. : 교통량 조사 및 노선 현황측량

○ ‘19.09. ∼ 10. : 관계기관 협의 및 조치결과 작성

○ ‘19.11.26. : 기본설계 노선자문

○ ‘19.12. ∼  ‘20.01. : 노선자문 조치결과 작성 및 관계기관 협의(보완)

○ ‘20.02. ∼  ‘20.03. : 설계VE 실시(1~3차), 교통소통대책 자문(교통운영과)

○ ‘20.04.17. : 설계지도점검(보행정책과)

○ ‘20.05.27. : 건설기술심의

○ ‘20.05.28. : 공공디자인 공동심의(디자인정책과)

○ ‘20.06.08. : 소규모재해영향평가 심의(하천관리과)

○ ‘20.07.13. : 소규모환경영향평가 협의요청

○ ‘20.07∼‘20.09 : 소규모환경영향평가 협의 및 도서보완

(서울지방국토관리청, 한강유역환경청)

4	준공기한 연기검토

○ 준공기한 연기 : 증)30일

- 당초 ‘19.04.22. ∼ ’20.10.31.  ⇒  변경 ‘19.04.22. ∼ ’20.11.30.

○ *******서울특별시

○ 지체상금 : 미부과

○ 연장사유 : 소규모환경영향평가에 대한 기관협의(서울지방국토관리청, 한강유역환경청) 결과(10월 통보)에 따른 특정기술 심의추진(3주이상 소요), 지장수목 제거로 인한 도시림등의 조성·관리 심의추진(11.12.) 및 도서반영 등 내실있는 설계 추진을 위하여 과업기간을 연장하고자 함.

5	검토의견

○ 상기 검토결과에 따라 주관부서(도로계획과)에 기본 및 실시설계용역 기간연장을 요청하고 용역추진에 만전을 기하고자 함.

6	향후계획

**

○ ‘20. 10. ∼ 11.

- 특정기술 심의(저소음포장)

- 도시림등의 조성·관리 심의(11.12.)

- 공사중 교통규제 심의

- 심의결과에 따른 도서보완 및 설계용역 준공

붙임 : 용역기간 연장요청(공문, 합의각서) 각 1부.  끝.