문서번호	설비부-16089
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	10/20 代여인웅
협조

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기 ·통신공사」

관급자재(영상감시장치 외 2건) 구매 계약취소 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기 ·통신공사」

관급자재(영상감시장치 외 2건) 구매 계약취소 검토보고

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 전기·통신 공사」건설사업관리단 에서 검토보고 된 관급자재(영상감시장치 외 2건)의 구매 계약취소 및 조치계획에 대해 아래와 같이 보고 드림.

1		관련근거

□ 관급자재 구매계약 취소요청 검토보고 : 동일감리 제20-254호(2020.10.06.)

□ 관급자재 구매계약 취소요청 검토보고 : 동일감리 제20-255호(2020.10.06.)

□ 관급자재 구매계약 취소요청 검토보고 : 동일감리 제20-271호(2020.10.19.)

2		공사개요

1. 전기공사

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 전기공사

□ 공사기간 : 1차 2019.03.26.~2020.12.30(총차 2019.03.26.~2021.07.30.)

□ 도 급 비 : 1차 700,000,000원(총차 1,338,419,940원)

□ 시 공 사 : ㈜엔큐 대표 정석용

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축

2. 통신공사

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사

□ 공사기간 : 1차 2019.03.27.~2020.12.30(총차 2019.03.27.~2021.07.30.)

□ 도 급 비 : 1차 250,000,000원(총차 589,611,000원)

□ 시 공 사 : ㈜세호영상 대표 박석신

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축,토문엔지니어링 건축사사무소

3		검토내용

□ 대상 관급자재 계약현황 (※세부계약내역 첨부1 참조)

연번	계약번호	품 명	계 약 자	계약금액(단위:원)	납품기한	계약방법
*	***********	******** ********	****	********** ***********	**********	********
*	***********	******** **********	** ******	********* ***********	**********
*	***********	********* *************	****	********** ***********	**********

□ 납품요구 취소사유 검토

□ 전기 및 통신공사는 4층~5층 추가 증축으로 인하여 준공기한이 2021.07.30.로 연장되었으며,

□ 해당 관급자재(3건)는 계약방법이 다수공급자 계약로 「다수공급자계약 특수조건 제26조」에 의거 납품기한 연장기간 최대(60일) 까지임.

□ 해당 관급자재(3건)는 공사 준공시점까지 납품기한 연기는 불가하여 계약취소 후 재구매가 필요함.

4		감리단기술검토의견

□ 서울의료원 권역응급센터 증축 전기, 통신공사 관련 관급자재(영상감시장치 외 2건)은 현 계약기간 내 반입, 설치가 불가능하여 기존계약을 취소하고, 물품다수공급자계약 특수조건 제26조4항(납품기한의 변경)에 의거, 해당 계약상대자와 새로운 구매계약을 체결함이 것이 타당함.

5		보고자 조치의견

□  건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어, 계약부서에 기존 물품의 계약취소 의뢰하고, 기존 계약상대자와 동일규격의 관급자재를 구매하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 기존계약내역서 각1부.

2. 합의서 각1부.  끝.