“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인 「공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사」에 대하여 자체 설계변경 심의회 결과에 따라 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사

나. 공사현황 : 음수대 내부배관 설치 D=15~25mm, L=315m

다 공사기간 : 2020. 8. 13. ~ 2020. 12. 21.

라. 계약금액 변경내역                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	**********	**********	***********

마. 설계변경사유 : 계약물량 증․감 및 보험료 등 실비정산

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고 및 심의개최결과 보고 각 1부.

2. 심의 의결서 1부.

3. 설계변경 수량산출서 및 내역서 1부.

4. 변경합의서 1부.  끝.

*추산:27851번 (2020. 10. 20.)

	급수운영과장
주무관	김초민		주무관	김혜경		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	10/20 이병운
협조자
시행	급수운영과-17364	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(5)