투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기 요청(노들로 구조개선 기본 및 실시설계)

1. 토목부-20104(2020.10.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『노들로 구조개선 기본 및 실시설계용역』과 관련하여, 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기  바랍니다.

가. 용 역 명 : 노들로 구조개선 기본 및 실시설계 용역

나. 용역개요 : 연장 L=8.5㎞, 폭 B=17.5 ～ 41m(왕복 4～8차로)

- 8차로 구간 : 양화교 ～ 양화대교 남단(B=41m)

- 4차로 구간 : 양화대교 남단 ～ 한강대교 남단(B=17.5m)

다. 용 역 사 : ㈜동명기술공단, ㈜도화엔지니어링, ㈜동희이앤씨

라. 용역기간 : 당초  '19.04.22.~'20.10.31. ⇒  ************************

마. 연장사유 : 소규모환경영향평가에 대한 기관협의(서울지방국토관리청, 한강유역환경청) 결과(10월 통보)에 따른 ********************************************************* 및 도서반영 등 내실있는 설계 추진을 위하여 과업기간을 연장하고자 함

붙임   1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 용역기간 연장요청(공문, 합의각서) 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최돈용		토목설계과장	김동현		토목부장	전결 10/20 김용제
협조자
시행	토목부-20172	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)