문서번호	보행정책과-13880
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보행안전팀장	보행정책과장
유용식	김성국	10/21 이상국

’20년 어린이보호구역 개선사업 예산재배정(성동구)

2020. 10.

도 시 교 통 실

(보행정책과)

’20년 어린이보호구역 개선사업 예산재배정(성동구)

「2020년 어린이 보호구역 개선사업」중 성동구 경동초 학교부지활용 통학로 확보 사업의 학교협의가 완료된 바 사업비를 재배정코자함.

※ 성동구 교통행정과–77469(2020. 10. 19.)호

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 경동초 학교부지 활용 통학로 확보사업

○ 사업위치 : 성동구 성수1로 34 (경동초)

○ 사 업 비 : 400백만원(전액시비)

○ 사업내용

- 경동초 우측 이면도로에 보도가 없어 어린이 교통사고가 우려되어 학교 부지를 활용하여 보도를 조성

○ 공사내용

- 보도설치(B=2.0m, L=190m), 도로 재포장 1,000㎡, 횡단보도설치, 노면표시, 교통안전표시, LED표지판 설치 등

□ 추진경위

○ 통학로 조성 관련 학교장 및 교육청 협의 진행 : ’19.  3.

○ 학교부지 사용승낙시 통학로 사업 방침통보 : ’19.  4.

○ 학부모 사업설명회(2회) 및 구청장 현장설명회(1회) : ’19.  5.~ 7.

○ 교육청 및 교육지원청 협의(경동유치원 동의 선행) : ’19.  8. 14.

○ 부구청장 교육지원청장 면담 : ’19.  8.

○ 사업 실시설계 추진(보행로조성 등 정비)	: ’20. 4 ~ 9월

- 설계과정에서 경동초등학교, 학부모 대표, 교육지원청 등 의견 수렴(’20. 8)

□ 재배정 내역

○ 사업비 400백만원 ※ 명시이월 200백만원, ’20년 사업비 200백만원

- 명시이월 재배정액 : 200백만원(기재배정)

□ 예산과목 : 도시교통실 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동편의 증진, 노인․장애인 보호구역 개선, 시설비(401-01)

- ’20년 사업비 재배정액 : 200백만원

□ 예산과목 : 도시교통실 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동편의 증진, 어린이보호구역 개선, 시설비(401-01)

○ 성동구 세부 추진계획

- 실시설계 결과에 따른 공사비 재배정(400백만원)   : ’20. 10.

- 공사계획수립 방침	: ’20. 10.

- 영구시설물 축조 시의회 동의	: ’20. 11.

- 공사발주 및 계약	: ’20. 11.

- 사고이월계획 수립 및 사고이월 요청	: ’20. 12.

- 공사 시행 및 준공	: ’21. 1. ~ 6.

□ 검토의견

○ 사업대상 구간에 대하여 설계를 완료하고 오랜 협의기간을 거쳐 교육지원청, 학교 관계자 등 최종 협의 마친바 사고이월 불가피하나 공사를 시행할 수 있도록 예산을 재배정하고자 함

○ 경동초 통학로 확보 사업 400백만원 재배정 추진(기재배정 200백만원)

※ 보도설치 190m, 도로재포장 1,000㎡, 횡단보도, 노면표시, LED 안전표지 등 설치

○ 사업대상지 위치도 및 현황사진

[ 위 치 도 ]	[ 경동초 전경사진 ]

□ 행정사항

○ 영구물 축조에 대한 시의회 동의 및 토지 무상사용허가 절차 이행철저

○ 조속히 공사 계약체결(11월)하여 사고이월 철저

○ 자치구에서 조속히 공사를 완료하고 사업 완료시 정비결과 보고

(자치구 → 서울시 보행정책과)

붙임 : 사업 완료시 정비결과 보고서 제출 서식 1부. 끝.

붙임1	사업완료 정비결과 보고서 제출서식(예시)

사 업 명 : ~

(00구)

□  사업개요

○ 사 업 명 : 00초등학교 주변 ~정비사업

○ 사업기간 : 2020. 00. 00. ~ 00. 00.

○ 사업규모 : 적색포장(폭 1.5m 길이 2.1m)

○ 사업예산 :      백만원

○ 사업내용 :

□  사업비 현황

○ 사업비 집행내역

구 분	예 산 액 (원)	집 행 액(원)		집행잔액 (원)
		금액(원)	비율(%)
시비

□  사업위치도

□  사진(전·후)

공사(전)	공사(후)