문서번호	현장민원과-16755
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장	서부수도사업소장
김종한		이준호	10/21 이종주
협조

규격위반 수도계량기 교체공사

관련 보고서

2020. 10.

서부수도사업소

(현장민원과)

규격위반 수도계량기 교체공사 관련 보고서

2015∼2017년 납품·설치된 납 성분함량 기준 초과된 수도계량기 교체와 관련 추가된 물량을 공사계약업체에서 교체토록하기 위함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 서부수도사업소 수도계량기 교체공사

○ 공사위치 : 서부수도사업소 관할지역 내

○ 교체대상 : ********************************************

납품업체	******	*****	*****
수 량	*****	*****	*****
교체방법	******	******	*******

- 경성제닉스 납품(1,314개)계량기는 업체에서 대체품으로 교체완료

- 미 교체 218건은 계측관리과-8452(‘20.09.17.본부장방침)호에 의거

시설관리공단에서 교체 시행 중

□ 현장조사 내용

- 2020년 장기간의 장마(40일 이상)와 코로나19 심각단계에 따른 비대면 근무로

인하여 옥내수전 교체의 효율저하와 10월 이후 원격수도계량기 집중설치에 따른

작업량 증가 등으로 교체업무의 어려움이 가중되고 있는 상황에서

- 경성제닉스 미교체 계량기(218건)를 시설관리공단에서 교체토록하였으나

2020년 사업소 만기수도계량기 목표(29,906건)를 달성하기 위해서는 추가된

계량기 교체에 어려움이 있음.

□ 보고자 의견

❍ 계측관리과-4854(‘20.05.27.본부장방침)에 의거 경성제닉스사의 미교체계량기(218건)을 2020년 11월30일까지 교체완료 코자 함

❍ 경성제닉스의 미교체계량기 218건을『서부수도사업소 수도계량기 교체공사』(계약체결일:2020년8월10일)**************************사업소 발주수량:12,371건)에 추가하여 교체공사 시행 코자 함. 끝.