“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	계약기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(오존주입설비 UPS 및 질소유량제어밸브 구매교체)

우리센터에서 시행하는“오존주입설비 UPS  및 질소유량제어밸브 구매교체”건에 대하여 아래와 같이 계약기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 건    명 : 오존주입설비 UPS 및 질소유량제어밸브 구매교체

나. 사업개요 : 오존발생기 UPS 4대 및 질소공급장치 유량제어밸브 1대 구매교체

다. 공사기간 - 당초 : 2020. 8. 25. ∼ 2020. 10. 24. ⇒ 변경 : 2020. 8. 25. ∼ 2020. 12. 24.

라. **********************

마. *************************

바. 연기사유 : 안정적인 공정운영을 위한 정비시기 조정

사. 지체상금 : 미부과

아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1) 계약기한 연기 검토보고서 1부

2) 합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	조광호		정수시설과장	10/21 전훈
협조자
시행	정수시설과-11003	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02-3146-5772	/전송	02-3146-5707	/	lovetou77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)