문서번호	정수시설과-11002
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	10/21 代김달호
협 조
	주무관			변민용

「오존주입설비 UPS 및 질소유량제어밸브 구매교체」 계약기간 연장 검토보고

2020. 10.

암사아리수정수센터

「오존주입설비 UPS 및 질소유량제어밸브 구매교체」

계약기간 연장 검토보고

현재 맛냄새물질 유입 등이 불안정한 관계로 안정적인 오존주입설비 운영을 위하여 아래 정비건에 대한 계약기간을 연장하고자 함

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 오존주입설비 UPS 및 질소유량제어밸브 구매교체

❍ 계약금액 : ************

❍ 계약기간 : ‘20.8.25. ~ 10.24.

❍ 사업내용 : 오존발생기 UPS 4대 및 질소공급장치 유량제어밸브 1대 교체

❍ 계약업체 : ***************

❍ 진행현황 : 물품 제작 완료 (현장 교체 대기 중)

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	************
	변 경	************
	증·감액	변경없음
계약기간	당 초	‘20.08.25. ~ 10.24.
	변 경	‘20.08.25. ~ 12.24.

※ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책소재 : 서울시 암사아리수정수센터)

❍ 변경사유

- UPS교체를 위해서는 오존발생기의 교번운전이 필요하며, 교번운전을 위해서는 오존발생기 4대 모두 일시적으로 가동이 중지 되어야 함.

- 질소유량제어밸브 교체 시에는 4대 모두 약 1시간 가동 중지 필요

- 현재 맛냄새 물질 유입 등에 따라 오존발생기 가동 중지기간이 길어질 경우 안정적인 공정운영의 차질이 우려되는 바, 계약기간을 연장하여 변경된 계약기간 내 수질이 안정되었을 때 즉시 정비코자 함.

□ 향후계획

❍ 계약변경(기간연장) 계약부서 의뢰(행정관리과)        : ‘20.10.21.

❍ 정비완료 및 검수                                    : ‘20.12.24.

붙임 : 합의서 1부.  끝.