문서번호	총무과-30865
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	김창중	10/22 김혁

시청사 빙축열 예비변압기 설치 전기공사

변압기반 및 저압반 구매설치 납품기간 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

행  정  국

(총  무  과)

시청사 빙축열 예비변압기 설치 전기공사

변압기반 및 저압반 구매설치 납품기간 변경보고

「시청사 빙축열 예비변압기 설치 전기공사」관련 변압기반 및 저압반 구매·설치는 지하 4층 장비 반입구 전동호이스트 설치에 따른 납품 기간을 연장하고자 함

□ 구매개요

○ 구 매 명 : 총무과 폐쇄형배전반(변압기반, 저압반) 구매

**************************

*****************************

*************************

○ 납품기간 : ****************************

□ 기간변경 사유

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부예규 제114호, ’20.6.10)

○ 설계변경 사유

- 지하 4층 장비반입구에 설치되어 있는 체인블럭을 전동호이스트로 교체에 따른 기간 변경(설치기간 : 10. 24 ~ 11. 07)

○ 설계변경 금액 : 없음

○ 계약기간 변경

당 초	2020. 9. 17 ~ 2020. 11. 09
변 경 후	2020. 9. 17 ~ 2020. 11. 16(7일 연장)

□ 향후일정

○ 변경 계약 통보  --------------  2020. 10. 22.(목)

붙임 : 1. 설계변경 합의각서 각 1부.  끝.