문서번호	도시관리과-11432
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
김지현		김남식	10/22 홍선기
협조

2020회계연도 도시경관개선사업

명시이월 추진계획

2020. 10.

도시계획국

(도시관리과)

2020회계연도 도시경관개선사업

명시이월 추진계획

2020회계연도 도시경관개선사업 추진 중 자치구로부터 요구된 이월 대상사업에 대하여 검토하고 다음과 같이 이월조치하고자 함

□  추진근거

□  2020회계연도 세출예산 명시이월 예정사업 제출 요청

(예산담당관-10500호, 2020.9.2.)

□  2020회계연도 명시이월 예정사업 제출 요청(시→구)

(도시관리과-9714호, 2020.9.4.)

□  2020회계연도 명시이월 예정사업 제출(중랑구)

(중랑구 도시경관과-17885호, 2020.9.11.)

□  사업개요

□ 사업대상: 16개소(계속 6, 신규 10)

- ’18~’20  성동구 성수동 지하철2호선 주변 건축물 옥상 경관협정

- ’19~’20  종로구 신영동 세검정로6나길 등 5개소 경관사업

- ’20~’21  중랑구 상봉2동 봉우재로33길 등 10개소 경관사업

□ 사업기간: ’20.01.01.~’20.12.31.

□ 총 사업비: 3,057백만원(당해-2,400백만원, 이월-657백만원)

□  명시이월 세부내역

□  사 업 명: 중랑구 상봉2동 봉우재로33길 경관개선사업

□  예 산 액: 1,000백만원(시비 500, 구비 500)

□  명시이월액: 500백만원(시비)

□  예산과목: 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원회 운영 등, 소외·낙후지역 도시경관개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□  이월 세부내역

사 업 명	예산현액 (A)	원인행위액 (B)	지 출 액 (C)	명시이월액 (D)	집행잔액 (A-(C+D))
중랑구 상봉2동 봉우재로33길 경관사업	500,000,000	0	0	500,000,000	0

□  명시이월사유

- 중랑구 상동2동 봉우재로33길 경관개선사업은 한전 지중화사업이 먼저 선행되어야 하나, 한전 지중화사업 중 복개도로 매설물 등 제한사항   발생으로 사업이 지연되어 연내 경관개선공사 발주가 어려울 것으로   예측되어 공사비 명시이월 필요

붙임  2020회계연도 명시이월 요구 내역서 1부.  끝.