문서번호	시설보수과-5495
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	★중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	10/22 정훈모
협조
	주무관		이석근

-2020년 중랑수계 하수차집시설물 유지보수공사- 설계변경(제2회) 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

중랑물재생센터

[시설보수과]

-2020년 중랑수계 하수차집관로시설물 유지보수공사-

설계변경(제2회) 시행 보고

우리센터에서 시행 중인 『2020년 중랑수계 하수차집시설물 유지보수공사』와 관련 신규공종 발생 및 시공물량 증ㆍ감에 따른 설계변경 시행 보고임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2020년 중랑수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020.03.19. ~ 2020.12.28.

○ 도 급 자 : ㈜상지카일룸  대표 최 기 보

○ 도 급 비 : ************

○ 공사개요 : 사각맨홀뚜껑 제작설치 7개소, 원형맨홀보수 10개소, 세굴방지벽설치 110m, 단면보수 720㎡, 기타 시설물 점검 결과 조치에 따른 보수공사

Ⅱ		보고내용

○ 설계변경 사유 : U형 차집관로 단면보수공사, 스크리설치 등 시공물량의 증ㆍ감이 발생하여 계약물량 증·감에 따른 설계변경 시행

○ 주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
단면보수	t30mm	㎡	500	675	증) 175
단면보수	t50mm	㎡	220	305	증) 85
물돌리기	D300mm	m	450	650	증) 200
스크린설치	1800*200mm	개소		7	증) 7
PE관접합 및 부설	D300mm	m	10	20	증) 10

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		***********	***********	**************
도급비	공급가액	***********	***********	**************
	부가가치세	**********	**********	**************
	계	***********	***********	**************

Ⅲ		조치계획

○ 상기와 같이 시공 물량 증ㆍ감에 대하여 설계변경 시행코자 함.

○ 예산비목 : 중랑물재생센터공통분야유지보수, 사업비용,영업비용, 처리비용, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 :  1. 설계변경 사유서-2회 1부.

2. 설계변경 내역서-2회 1부.  끝.