문서번호	시설관리과-18081
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
주세진	김성호	10/22 이승완
협 조

『2020년 수유1동외 8개동 상수도공사』

현   장   실   정   보   고

2020. 10. 22.

북부수도사업소

(시설관리과)

『2020년 수유1동외 8개동 상수도공사』

현  장  실  정  보  고

『2020년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련하여 건설사업관리 용역사****************】로부터 현장실정 보고서(*********가 제출되어 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 현장실정 보고(이준2020-73호)(2020.10.14.), 실정보고 제출

공사현황

〇 공 사 명 : 2020년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

〇 공사개요 : D = 15~300mm, L = 1,186m

〇 계약기간 : 2020. 5. 27. ~ 2021. 6. 30.

〇 도 급 비 :*******

〇 도 급 자 :*************

보고내용

〇 잔토처리장 변경

- *********************************************************************************************

******************************************

- *****************************

〇 잔토처리장  당초 : ***************

변경 : ***************************************)

〇 위치도(운반거리) 및 현장사진

잔토처리장 위치	잔토처리장 입구(농지성토)	잔토처리장 현황(농지성토)

검토결과

〇 발생토사 반출 대상지는 김포시에서 인·허가된 농지조성지로 현재 성토 공정률이 약 40%정도 진행되어 잔토(발생토)처리장으로 적정하다고 판단됨

- 잔토처리장 변경검토

· 위    치 : ***********************

· 현    황 : 농지조성 성토공사 중으로 세륜시설, 살수설비, 현장사무실 등 확인

· 운반거리 : **********************************

- 운반거리는 당초설계거리(69.6km)보다 약 1Km증가됨.

· 운반거리 및 운반비 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
거 리	*****	*****	******
운반비	*******	*******	*********

조치계획

〇 원활한 공사시행을 위해 잔토처리장을 우선 변경 승인하고 잔토처리장 변경에 따른 운반비 정산은 추후 설계변경에 반영 하고자 함

〇 잔토처리장 변경 승인사항에 대하여 공사계약업체인 **************************에 통보하여 잔토처리 및 감리업무에 철저를 기하도록 조치하고자  함.

붙 임 : 현장실정 보고서 1부.  끝.