문서번호	시설과-3232
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	하종식	박종수	10/22 박미애
협 조
	재무팀장		곽선아

「길동생태공원 무장애친화공원 조성공사」

실정사항 검토 보고

2020. 10.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「길동생태공원 무장애친화공원 조성공사」

실정사항 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「길동생태공원 무장애 친화공원 조성공사」와 관련하여 현장 실정 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 길동생태공원 무장애친화공원 조성공사

○ 위    치 : 길동생태공원

○ 도 급 비 : 329,353,100원

○ 공사기간 : 2020. 7. 1. ~ 10. 28.

○ 도 급 자 : **************

□ 실정사항 보고

○ 실정보고 검토 : 공사감독3처-8874(2020.10.15.)

구분	검토 사항	검토결과(감독처)	검토결과 (발주처)
진입광장	◼2021년 공사 시행예정인 도시철도 9호선 4단계 연장공사로 인해 진입 광장 구간이 저촉되어 해당 구간 공사 타절 - 진입로 구간중 포장단차로 인해 휠체어 등 불편을 초래하는 일부 구간 재포장	◼저촉구간 공사 타절 및 일부 구간 기존 판석 재활용하여 포장 반영 - 휠체어등 이동에 불편을 초래하는 일부 구간만 재포장하고 나머지 부분 공사 타절 ************************ **********************	승인
광장지구	◼ 노후파고라 철거 및 설치 - 기존 파고라와 평의자가 부식되어 안전을 위해 철거.설치 필요	◼노후 파고라 철거 및 신규 설치 반영 - 기존 노후 파고라 및 평의자 교체하여 이용객의 안전한 휴식 도모 ******************************* ********************************* ***************************** ******************************
	◼ 노후 포장 교체 필요 - 반딧불 체험관 입구 및 파고라 하부의 아스팔트 포장의 노후화로 파손되어 물고임 발생 등으로 교체 필요	◼파손 포장의 철거 및 재포장 반영 - 파손 된 포장 철거 후 흙콘크리트 포장 ***************************** ************************************* ****************************** *************************************** *************************************

구분	검토요청 사항	검토의견	비고
습지지구	◼ 진입 산책로 데크 선형 조정 - 진입 산책로 경사도 조절을 위해 당초 설계가 지그재그로 설계되어 데크 설치시 기존 녹지대 훼손이 심함으로 일자형으로 시공 요청	◼진입산책로 선형 조정 반영 - 산책로 진입데크 구간에 지반정리 및 기존 노후 목재데크를 일부 철거후, 재 설치시 구배조정을 통해 녹지대 훼손 최소화 - 지반조성 구간 사면 안정화를 위한 맥문동 식재 ******************************* ******************************** *************************************	승인
	◼ 노후 데크 및 산책로 경사도 조정 - 기존 산책로 데크가 노후 되어 파손의 위험이 있어 교체 필요 - 산책로의 경사도가 심하여휠체어 등의 이동이 어려움으로 경사도 조절 필요	◼ 산책로 데크 경사도 조정 반영 - 기존 노후된 48m 데크 철거 후 신규설치 하여 이용객의 안전 도모 - 산책로의 경사도 조절을 위해 기존 철거 48m와 연결하여 22m를 추가 설치하여 휠체어 등의 이동이 원활할 수 있도록 경사도 15%→6%으로 조정 ************************************ ************************************** ********************************
밧딧불 체험원	◼ 노후 파고라 정비 - 노후 파고라의 정비를 통하여 안전한 휴식공간 조성 필요	◼노후 파고라 철거 및 신규설치 반영 - 기존 노후 파고라 철거 후 신규 파고라 설치 및 파고라 하부에 데크를 설치하여 편안한 휴식공간 조성 ******************** ********************************* ***********************************
	◼ 휴게공간 진입테크 구배 조정 - 휴게공간 진입데크 설치구간은 기존 수목으로 절토 곤란으로 경사도 8%이내의 우회 동선 필요.	◼ 휴게공간 진입테크 램프설치 - 경사도 8% 램프를 설치하여 휠체어등 이동이 원활 할 수 있도록 함 ***************************
관급 자재	◼ 진입광장 공사제외 구간 관급자재 변동 - 신규 관급자재는 내역에 반영	◼ 진입광장 관급자재 변경 반영 **************** *************************** ******************************** *************************
기타	◼ 광장지구 신규파고라 구조 안정성 검사에 따른 검사비 반영 필요	◼ 파고라 구조 안전 검사 수수료 내역 반영

□ 소요예산 내역(개략금액)

구 분	금액(천원)			비고
	당초	변경	증,감
도급공사비	*******	*******	********	증
관급자재비	******	******	********	감
총 공 사 비	*******	*******	********	감

※ 상기내용은 개략적인 물향과 금액이며 시공 시 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항은 설계변경 시 반영

□ 예산검토

○ 예산집행 내역

(단위 : 원)

구분	예산액 (1)	공사비집행액				잔액 (1-b-d)	비고
		발주액 (a)	계약액 (b)	낙찰잔액 (c=a-b)	관급자재 (d)
	465,850,100	375,365,000	***********	**********	**********	**********

‣ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 시설과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 시민참여 프로그램운영, 무장애 친화공원 조성, 시설비및부대비, 시설비

□ 준공기한 연기검토{준공기한 연기검토 공사감독3처-9023(2020.10.19.)}

○ 연기사유{준공기한 연기검토 공사감독3처-9023(2020.10.19.)}

- 추가공종 및 장기간 강우로 인한 작업 소요 일수 부족으로 공기 연장 필요

※ 기상현상증명서 참고

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2020.07.01. ~ 2020.10.28.

- 변경 : 2020.07.01. ~ 2020.11.30.(33일 연장)

○ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 검토의견

○ 실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 실정검토내용과 같이 시행하고 추후 설계변경 시행

○ 도급공사 준공기한 변경 계약 요청(→공원운영과)

○ 관급자재 계약 및 납품기한 변경계약 요청(→공원운영과)

붙 임  1.공사현장 실정보고 제출 1부.

2.준공기한 연기 요청 1부.  끝.