문서번호	건축부-17914
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
이승현		代이제관	10/23 이창구
협조

「서울 운현궁 보수공사」

실정보고 검토결과 보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(건  축  부)

「서울 운현궁 보수공사」

실정보고 검토결과 보고

「서울 운현궁 보수공사」관련 문화재 상주감리원으로부터 제출된 실정보고 사항에 대한 검토결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울 운현궁 보수공사(장기계속)

*********************************************************

○ 공사기간 : ′19. 08. 01. ~ ′21. 01. 31.

○ 시 공 사 : 희우건설(주), 유한회사 서림문화재

○ 감 리 자 : ㈜경복영건

□ 추진경위

○ ′19. 08. 01. : 1차 공사 착수

○ ′19. 08.~ ′20 02. : 1차~3차 문화재 자문회의

○ ′20. 02. 18. : 실정보고 승인 (1차공사 1~4회, 총차공사 1~2회)

○ ′20. 04.~ ′20 06. : 4차~5차 문화재 자문회의

○ ′20. 08. 14. : 2차 공사 착수

○ ′20. 09. 09. : 실정보고 승인 (1차공사 5회, 2차공사 1회)

○ ′20. 10. 07. : 예비준공검사

○ ′20. 10. 15. : 실정보고 기술검토 보고(감리원→건축부)

□ 관련근거

○ 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

○ 실정보고(2차2회) 제출 [운현궁 감 제*******01(′20.10.15)호]

□ 실정보고 검토내용

○ 주요 변경사유

: 예비준공검사 지적사항 반영

********************************************************

************************************************************************

***********************************

※ 상세내역 붙임 실정보고 내역 등 참조                                     (단위:원)

구 분			변 경 전	변 경 후	증 감
도급 금액	2차 공사	직접공사비	**********	**********	**	*********
		제경비	**********	**********	**	*********
		VAT	**********	**********	**	*******
		계	***********	***********	**	*********

○ 단가 적용기준(공사계약 일반조건 제7절)

- 신규비목 : 실정보고 기준일 산정 단가 × 협의율************* 적용

- 기존비목 단가(물량증·감) : 계약단가 적용

□ 감리원 의견

○ 실정보고 사항 검토 결과, 예비준공검사에 따른 *********************************************************

□ 처리의견

○ 상주감리원 검토의견에 따라 실정보고 승인

**********************************************************************************************

붙임 : 1) (감리원) 실정보고 검토의견서 1부.

2) (시공자) 실정보고 내역서 등 관련서류 1부.   끝.