문서번호	계약심사과-18396
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
조성도		노형근	10/25 김수정
협 조

강서자원순환센터 건립 기본 및 실시설계 설계경제성 심사(VE) 실행계획

2019. 10.

재 무 국

[계약심사과]

강서자원순환센터 건립 기본 및 실시설계

설계경제성 심사(VE) 실행계획

강서구청 자원순환과 시행「강서자원순환센터 건립 기본 및 실시설계」에 대해 설계VE전담팀을 구성하고, 설계경제성 심사(VE)를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 설계경제성 심사 신청(강서구청 자원순환과-26193. ‘19. 10. 21.)

2		심사 요청 개요

□ 신청부서 : 강서구청 자원순환과

□ 사 업  명 : 강서자원순환센터 건립 기본 및 실시설계

□ 위    치 : 강서구 마곡동88번지 일대(서남물재생센터 내)

□ 사업내용

- 재활용품 선별시설 95톤/일 이전설치

- 대형폐기물 적환시설 70톤/일 이전설치

□ 공 사 비 : 8,864백만원

□ 사업기간 : ’19. 1. ~ ’20. 12.

□ 설계공정률 : 50%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진 방법 : VE전담팀을 구성하여 설계경제성 심사(VE)

○ VE심사팀, 발주부서, 설계사 등 18명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸노형근 토목심사2팀장 계약심사과 ▸조성도 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸임종권 승화기술정책연구소	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸김헌 요원 한국철도기술연구원	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (5개 분야)	▸(건축구조) 송병석 위원 ㈜케이 엔지니어링 ▸(건축시공) 이서종 위원 ㈜삼우씨엠건축사사무소 ▸(토목시공) 안삼현 위원 ㈜진우엔지니어링 ▸(기 계) 허석민 위원 정연기술사사무소 ▸(전 기) 송하봉 위원 창대티이씨	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	▸고재철 주무관 강서구청 자원순환과	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(8명)	▸김형두 이사 ㈜동일기술공사	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
’19. 11. 21.(목) 11:00~17:00	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 서울에너지공사 마곡 열병합발전소 사무동 1층 회의실
’19. 11. 22.(금) 10:00~17:00	- 검토회의 : 기능정리, 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 11. 29.(금) 10:00~17:00	- 최종검토회의 : 구체화 발표, 제안 채택유무 결정 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 11. 14(목)	- VE 제안 채택결과서 송부 (계약심사과 ⇒ 강서구청 자원순환과)
’19. 11. 21(목)	- 설계경제성 심사(VE) 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 강서구청 자원순환과))

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19. 10. 21.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19. 10. 24.		설계경제성 심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 경 제 성 심 사 (VE) 운 영		’19. 11. 21. ~ ’19. 11. 29. (1일차~9일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2,3차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’19. 12. 2. (12일차)		VE 제안 채택결과서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 채택 검토회의 결과서 통보
		’19. 12. 3. ~ ’19. 12. 6. (16일차)		설계VE 심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸ 설계경제성 심사 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’19. 12. 9. (19일차)		설계VE 심사결과 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요 예산

□ 총금액 : 9,417천원

○ 외부위원 수당 : 8,917천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,472천원(2,472천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 5,695천원(1,139천원 × 5명)

- 진행보조요원(초급기술자)    : 750천원(750천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(강서구청 자원순환과)

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후 계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보------------  ’19. 12. 9.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.