투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(퇴계로<2단계) 보행친화공간 재편 전기공사)

우리본부(설비부)에서 시행 중인『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사

2. 공사위치 : 퇴계로2가 교차로 ~ 광희동 사거리

3. 계약업체 : ***************

4. 계약금액 및 기간

계 약 금 액(원)	계 약 기 간	비 고
*************	2019. 9. 2. ~ 2020.10.31.

5. 준공기한 변경 내역

가. 변경사유 : 선행공정(토목공사) 준공기한 연기에 따른 해당 공정(전기공사) 연기

나. 준공기한 변경

계 약 금 액(원)	계 약 기 간		비 고
	당 초	변 경
*************	2019. 9. 2. ~ 2020.10.31.	2019. 9. 2. ~ 2020.11.15.

※ 계약금액 변경 없음

다. 귀책기관 : 서울특별시 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

라. 예산과목 : 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경개선, 퇴계로 도로공간재편, 시설비

붙   임 : 1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기 보고서 1부.

3. 감리단 준공기한 연기 요청 공문 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	김은덕		설비부장	10/26 이달영
협조자
시행	설비부-16417	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)