문서번호	설비부-16591
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	10/27 이달영
협 조

『시립동대문 실버케에센터 건립 전기공사』

설계변경(총차1회, 1차1회) 및 2차공사 계약요청 검토 보고

2020. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사』

설계변경(총차1회, 1차1회) 및 2차공사 계약요청 검토 보고

위 공사와 관련하여 계약내역 조정 및 보험료 정산에 따른 설계변경 및 2차분 계약요청에 대해 검토 후 보고 드림.

**************************************************

**************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 「공사계약일반조건」제19조(설계변경 등)

◌ 설계변경(총차1회, 1차1회) 및 2차공사 계약요청 검토 보고

- PC20(동대문 실버케어)-398(2020.10.23.)호

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

◌ 공사위치: 서울시 동대문구 답십리동 553외 1

◌ 공사내용: 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95m2, 노유자시설

- 주요설비: 수배전반설비(400kVA), 전등 및 전열설비, 태양광발전설비, 전력 및 조명제어 설비 등

****************************************************

*********************************************

*******************************

***********************

********************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 검토목적

◌ 본 공사의 선행공정인 건축공사 진행부진으로 계약서상 1차공사 준공이 불가능한 바, 시공가능 공정 내역변경 및 2차분 공사 계약요청의 적정성 여부 검토

□ 검토개요

◌ 1차공사 내역변경 및 변경(정산)계약 요청

◌ 2차공사 계약요청

□ 공종별 증․감 내역

(단위: 원)

품 명	총차내역	1차 내역		2차(발주예정) 내역
		변경 전	변경 후
**************	*********	*	*	*********
************	**********	*	*******	**********
**********	**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********	**********
**********	**********	**********	**********	***********
*************	**********	*	*	**********
******************	**********	**********	*********	*********
**************	*********	*	*	*********
****************	**********	**********	**********	*********
**************	*********	*	*	*********

**********************************************************

*******************************************************

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

구분	공종	당 초	변 경	증・감		비 고
**	***	**********	**********		*
	***	***********	***********		*
	*********	**********	**********	**	***********
	******	***********	***********	**	***********
	*****	**********	**********	**	*******
	***	**********	**********	**	*********
	*****	**********	**********	**	*********
	*****	***********	***********	**	**********
**	***	**********	**********	**	*********
	***	**********	**********	**	*********
	*********	**********	**********	**	**********
	******	***********	***********	**	*********
	*****	*********	*********	**	*******
	***	**********	**********	**	*********
	*****	**********	**********	**	*********
	*****	***********	***********	**	**********

□ 2차분 공사발주 내역

***************************

*****************************************

□ 건설사업관리기술자 검토의견

*********************************************************************************

Ⅳ		보고자 의견

*****************************************************************************************************************

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2020. 10. 29.: 설계변경(총차1회,1차1회) 시행 및 계약

□ 2020. 10. 30.: 2차분 계약의뢰

□ 2020. 11. 9.: 1차분 준공검사

붙임  1. 건설사업관리단 검토 보고 1부

2. 설계변경 내역서(총차1회, 1차1회) 각 1부.

3. 계약내역서(2차분) 1부.  끝.