문서번호	설비부-16593
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	10/27 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』

1차공사 내역변경 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」

1차공사 내역변경 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」시행 중, 지하층 동바리 해체 시점이 지연되면서 1차공사 준공기한을 내에 시공하기 어려워 아래와 같이 내역을 변경하여 공사하고자 검토보고 드림

※ 계약금액 및 공사기한은 변경사항 없음

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’19.10.25.~’21.03.24.(1차  ’19.10.25.~’20.11.02.)

□ 공사금액 : 총차 510,130,870원(1차 30,000,000원)

□ 도 급 사 : 경문이엔지주식회사

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

□ 기계설비공사 1차 내역변경 : PC20(동대문 실버케어)-402호(2020.10.27.)

Ⅲ		검토내용

□ 변경사유

-	당초 건축 예정공정표상 ’20.9월말까지 지하층 동바리 해체 및 기계실 천장 콘크리트 면처리 완료 예정이었으나, 그 시기가 ’20.11월말까지 지연되면서

- 1차공사로 반영된 지하층 기계실 배관 공사를 1차공사 준공기한 내 시행하기 어려워 시공 가능한 물량으로 변경하여 시행하고자 함

□ 1차공사 내역변경 주요내용

구분	당초	변경
기계	- 기계실배관 전체 물량 반영 - 스리브 일부 물량 반영	- PIT층 및 지상1층 급수배관, 위생배관 물량 반영 - 스리브 전체 물량 반영

-	1차공사 내역만을 조정하는 것으로 계약금액 및 공사기한은 변경없음

□ 공종별 금액 조정내용                                     (단위 : 원)

공종	당초	변경	증감
******	*	*	*
******	*	*	*
*******	**********	*******	***********
********	*********	*********	*********
********	*******	*********	*********
******	*******	*******	*******
******	*	*********	*********
******	*	******	******
******	*	*	*

□ 건설사업관리기술자 검토의견

-	건축공사 지연으로 기계공사에서 시공가능한 부분으로 시행하기 위하여 1차공사 내역을 변경함이 적정함

Ⅳ		보고자 의견

□ 건설사업관리기술자의 의견과 같이 시공가능한 부분으로 1차공사 내역을 조정하는 것이 적정하다고 판단되어 변경계약 요청하고자 함

□ 내역변경 후 2차공사를 조속히 발주하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.