“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	교육지원과-14304		주무관	강남인강팀장		교육지원과장		행정국장
			정경진	김재범		이미화		전결 10/27 신동명
등록일자	2020.10.26.
결재일자	2020.10.27.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

강남인강 시스템 운영의 효율성 증진을 위한 -

2020년 강남인강 DB서버 이전 추진 결과

□ 사업기간 : 2020. 5. 4. ~ 2020. 10. 15.

□ 추진현황

❍ 추진기간 : 2020. 5. 4. ~ 10. 15.

❍ 이전장소 : :LEU+ IDC → 區 통합전산실

❍ 추진내용

- DB 서버 장비 구매 및 설치

- DB자료 이전 및 OS업그레이드

- LEU+에 보관중인 강남구 전산장비 이전

❍ 설치내역

구분	항목	구성내용	수량	비고
**	****	****************** ******************** *******************	*
************	******	*********************** ************************************************ ************ ******************** *************	*
	*****	************************	*
********	**********	**********************	*
	**********	***********	*
	*********	******************	*
	***	*********	*

2020.  10.   .

	강 남 구
(		교육지원과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 2020 지방자치단체 예산편성 운영기준
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 區 통합 전산실 이전을 통한 예산절감 및 노후화 장비 교체
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당사항 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남인터넷 수능방송 이용자
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ◌ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진 상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ◌ ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ◌ ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요.
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

강남인강 시스템 운영의 효율성 증진을 위한 -

2020년 강남인강 DB서버 이전 추진 결과

LEU+에서 민간위탁 운영 중인 강남인강 웹시스템을 區통합전산실로  이전하며 구장비를 교체하여 예산절감 및 양질의 서비스 제공에 기여함

Ⅰ		관련근거

❍ 전문감사위원 감사결과 통보(감사담당관-1746, 2019.2.18.)

- 교육지원과와 전산정보과가 서로 협의하여 강남인강시스템 운영장비를   區통합전산실로 이전하는 방안을 마련하시기 바람

❍ 강남구청인터넷수능방송시스템 운영 개선계획(교육지원과-5810, 2019.4.18.)

❍ 2019년 강남인강 웹시스템 이전 추진 계획(교육지원과-15660 ,2019.11.6.)

❍ 2020년 강남인강 DB서버 이전 추진 계획(교육지원과-2085, 2020.2.14)

Ⅱ		추진개요

□ 사 업 명 : 강남인강 DB시스템 서비스 개선(DB서버 등) 및 장비 이전

□ 추진기간 : 2020. 5. 4. ~ 10. 15.

□ 이전장소 : ㈜LEU+(현재) → 강남구 통합전산실

□ 추진내용

❍ DB서버, DB S/W 및 네트워크 장비 구매 및 구축

❍ DB자료 이전, 홈페이지 연계

❍ 기존 용역중인 스토리지 장비 이전 및 설치 : ㈜LEU+ KIDC → 區통합전산실

❍ DB 운영체계 업그레이드 실시 (오라클10G →12C)

❍ DB보안을 위한 DB암호화 프로그램 설치 : 케이사인 SecureDB

□ 계약방법 : 조달청 경쟁입찰(협상에 의한 계약)

□ 소요예산 : 215,600천원 (VAT포함)

Ⅲ		추진경과

❍ 2019. 2.18. : 전문감사위원 감사결과 통보(감사담당관)

❍ 2019. 4.18. : 강남구청인터넷수능방송시스템 운영 개선계획 수립

❍ 2019. 11.06. : 2019년 강남인강 웹시스템(웹서버) 이전  추진 계획 수립

❍ 2019. 12.24. : 2019년 강남인강 웹시스템 이전 추진 조달계약(㈜유디피시스)

❍ 2020. 1.21. : 강남인강 웹서버 이전 완료

❍ 2020. 1.22. ~ 2. 7 : 강남인강 DB서버이전관련 사전조사(장비, S/W 품목, 이전방법 협의 등)

❍ 2020. 2. 24. : DB서버 이전 추진 계획 실시

❍ 2020. 5. 14. : DB서버 이전 추진 조달계약(㈜아이페타)

❍ 2020. 6. 10. : DB서버 장비 구청 통합전산실 입고

❍ 2020. 6. 10. ~ 9. 23. : 서버 이전을 위한 테스트 및 데이터 이관

❍ 2020. 9. 24. : 1차 DB서버 이관 시도 후 원복

❍ 2020. 9. 24. ~ 10. 12. : 1차 실패 원인 분석 및 2차 이전을 위한 테스트

장 애	원 인	방 안	비 고
웹서버 다운	WAS서버 타임존 미적용	WAS서버에 아시아 서울로 타임존 적용	해결
모바일 앱 접속불가	오라클12C에서 미지원	소스변경(대체함수 사용)	해결
SMS/메일 인증불가	EMS 2003버전 서버 미지원	WAS서버에 EMS모듈 설치/ 인코딩 수정	해결

❍ 2020. 10. 12. : 서버 이관을 위한 시뮬레이션 실시

❍ 2020. 10. 13. : DB서버 이전 완료

Ⅳ		세부 추진내용

□ 상세 작업 내역

작업명	작업 시간	소요 시간	작업 내용	결과
LG IDC 서비스 중지	13일 23:00 ~ 13일 23:30	30분	Web 서버 중지 SMS 서비스 중지	정상
WAS 데이터 이관	13일 23:15 ~ 14일 00:00	45분	데이터 추가 Sync	정상
DNS 이관	13일 22:00 ~	10분	IP 변경	정상
DB 데이터 이관	13일 23:06 ~ 14일 02:00	174분	데이터 Export, 전송, Import 및 이관 자료 확인 이상 없음	정상
SMS 이관	13일 23:13 ~ 14일 00:45	58분	LG 서비스 중지 및 서비스 ID 변경	정상
DB 암호화 작업	14일 02:00 ~ 14일 02:50	50분	암호화 설정 및 Table Index 작업	정상
Web 개시 및 서비스 점검	14일 02:50 ~ 14일 05:20	150분	서비스 정상화 확인	정상
서비스 이관 종료	14일 05:40

□ 시스템 장비 설치 내역

**	**	****	**	**
**	****	****************** ******************** *******************	*
************	******	*********************** ************************************************ ************ ******************** *************	*
	*****	************************	*
********	**********	**********************	*
	**********	***********	*
	*********	******************	*
	***	*********	*

□ 장비 및 소프트웨어 구매 사진

DB서버	10G Switch
SAN Switch	L2 Switch
DB 소프트웨어(오라클12C)설치	DB 암호화 Secure DB설치

Ⅴ		향후 계획

□ 서버 이전 이후 장애발생 조치

장 애	원 인	방 안	비고
휴면계정에 자동 메일 발송 장애	DB운영체제 버전 업그레이드에 따른 미지원	메일 자동 발송하는 솔루션 구매 후 소스 개발	12월 초까지 정상화
실시간 계좌이체, 가상계좌 입금 장애	DB운영체제 버전 업그레이드에 따른 이니시스 결제 미지원	URL방식으로 결제하는 솔루션 개발	11.4(수)까지 정상화

□ 강남인강 전산 시스템 유지보수 계약 체결 (2020. 10. 16. ~ 12. 31.)

□ LG IDC센터 내 강남인강 장비 포맷 (2020. 10. 27. 16시)

붙임. LG IDC 센터 내 강남인강 장비 목록 1부. 끝.