문서번호	시설과-3314
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
김대영	조민형	10/28 박종수
협 조

- 응봉공원 잔디광장 노후 탄성트랙 정비공사 -

실정보고에 따른 검토보고

2020. 10.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

- 응봉공원 잔디광장 노후 탄성트랙 정비공사 -

실정보고에 따른 검토보고

「응봉공원 잔디광장 노후 탄성트랙 정비공사」와 관련, 감독기관으로부터 현장 실정보고서가 제출되어 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 응봉공원 잔디광장 노후 탄성트랙 정비공사

❍ 위    치 : 서울 성동구 금호로 172-1(응봉공원)

❍ 공사내용 : 탄성트랙 포장 1,473㎡, 흙콘크리트 포장 98㎡ 등

❍ ********************************

❍ ******************

❍ ***********************

□ 보고내용

❍ 관련근거 : 공사 실정보고 승인요청[서울시설공단 공사감독3처-9236호(2020.10.22.)]

❍ 실정보고 내용

구분	현 황	검토결과	비고
식재 공사	- 식재지 추가 및 수목 추가반영 필요 (장미정원 식재지 외 1개소 추가)	- 계절적 경관성 등을 감안하여 수목의 규격, 수량, 위치 등 재조정 ∙회양목(H0.3*W0.3) : 0주 → 550주 ∙백철쭉(H0.3*W0.3) : 0주 → 1,800주 ∙산철쭉(H0.4*W0.4) : 1,740주 → 0주 ∙산철쭉(H0.3*W0.3) : 0주 → 700주 ∙영산홍(H0.3*W0.3) : 0주 → 1,000주 ∙잔디(0.3*0.3*0.03) : 133.86㎡ → 341㎡ ∙식재면고르기 : 177.46㎡ → 270.66㎡	회의록 (‘20.09.18.)

구분	현 황	검토결과		비고
시설 공사	- 잔디광장 진입로 수목보호틀이 노후 하여 철거 필요	- 수목보호틀 철거 ∙수목보호틀(1450) : 0개소 → 8개소		회의록 (‘20.09.18.)
	- 공원 진입산책로(교회인접부) 포장 적용 필요	- 식생매트 추가 적용 ∙식생매트깔기(W1000) : 0m → 202m
	- 우레탄포장 하부 기초콘크리트 상태 양호 및 배수지 상부 슬라브 충격 등을 감안, 기초콘크리트 존치 필요	- 우레탄포장 하부 무근콘크리트 존치 ∙우레탄철거(탄성층+무근콘크리트) : 1,430.41㎡ → 0㎡ ∙우레탄철거(탄성층) : 0㎡ → 1,430.41㎡ ∙무근콘크리트 철거(진입로) : 0㎡ → 410.37㎡		회의록 (‘20.09.23.)
	- 경계석A 직선구간이 현장과 상이(곡선)	- 현장상태에 맞게 곡선구간은 경제석B (곡선) 적용 ∙경계석B : 71m → 106m
	- 파라고 구간에 설치된 평의자로 인해 투수블록포장 시공이 어려워 이설 필요	- 원활한 시공을 위해 평의자 이설 후 재설치 ∙평의자이설 : 0개소 → 10개소
철거공사	- 시민접점지역임을 감안, 안전시설 필요		- 가림막펜스 추가 반영 및 규격 상향 ∙가림막펜스(1800*3000) : 0경간 → 25경간

❍ 공사비 증감내역(개략)

(단위 : 원)

구 분		공 사 비		증․감	비고
		당 초	변 경
총공사비		***********	***********	************
도급비	공급가액	**********	***********	************
	부가세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************
관급비		***********	***********	*

※ 상기내용은 개략적인 물량 및 금액으로 시공 시 현장여건에 따라 일부 변경가능

□ 검토의견

❍ 실정보고 사항에 대한 조건부 승인 통보 : 서울시설공단

- 식재공사 :  수목의 종류, 수량, 규격, 배식 방법등을 제검토하여 현장여건과    공원의 계절감을 느낄 수 있도록 변경시행(붙임참고)

- 시설공사, 철거공사 : 승인

❍ 상기 실정보고 사항에 대해 증가 금액은 집행잔액(낙찰차액 등)을 활용, 추후 설계변경 시 반영

붙임 : 시설공단 실정보고 공문 1부.  끝.