문서번호	기반시설과-4122
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
김일문	라철흠	전영주		10/28 신용목
협 조
	총무과장		이상이
	기획예산과장		代이경춘
	기전설비과장		최영조

(양화대교남단 경사형 승강기)

구조개선사업 추진계획

한강사업본부 시설부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

양화대교남단 경사형 승강기 구조개선사업 추진계획

노후로 인한 잦은 고장으로 시민불편을 초래하고 있는 양화대교 남단 경사형 승강기에 대해 금년도 예산집행잔액을 활용, 조기 실시설계를 추진하여 사업추진 및 시민안전에 만전을 기하고자 함.

▢ 추진근거 : 한강공원 승강기 리모델링계획(본부장방침(‘20.9.24)

▢ 사업개요

○ 사업명   : 양화대교남단 승강기 구조개선공사

○ 사업기간 : 2020.11 ~ 2022.12

○ 총사업비 : 3,800백만원(설계비 127, 공사비3,673)

※ 2021년도 예산반영 : 800백만원(’2022 : 2,873백만원)

○ 사업규모 : 기존 경사형승강기 철거후 승강기 및 비상계단 설치 2개소

▢ 현황 및 정밀점검결과

○ 설치년도 : 2009년11월

○ 규    격 : 15인승

○ 정밀점검결과 : 외산제품인 노출형 경사형 구조로 부품수급 및 유지관리에 어려움이 있어 밀폐구조의 수직형 승강기로 교체필요

양화남단상류측	양화남단 하류측

▢ 예산확보계획

○ 시행중인『승강기 설치사업』 집행잔액(낙찰차액 등) 활용하여 조기      사업추진

○ 설계용역비 : 126,185천원

○ 승강기 설치 예산집행 현황

(단위:백만원)

예산현액	재배정액	사용가능액			비고
		계	집행잔액	낙찰차액
3,518	3,382	189	136	53

○ 예산과목 : 한강공원시설관리및개선, 한강공원접근시설유지관리,시설비

▢ 향후 추진일정

○ 타당성 심사      : 2020.10.30

○ 입찰공고         : 2020.11.1. ~ 11.15

○ 용역계약 및 착수 : 2020.11.25

○ 설계완료        : 2021.6.30

○ 공사시행        : 2021.7 ~ 2022.7

▢ 사업효과

○ 조기 설계착수하므로써 원활한 사업추진으로 잦은 고장에 따른 시민 안전사고 예방

따로붙임 : 한강공원 승강기리모델링 계획1부. 끝.