문서번호	시설보수과-3795
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
신재현	우배용	조선행		10/28 代김학춘
협 조
	주무관		박성욱

- 근무환경개선공사 -실정보고(6차) 검토 보고

2020. 10.

난지물재생센터

(시설보수과)

- 근무환경개선공사 -

실정보고(6차) 검토보고

난지물재생센터 근무자운영실 및 작업실 근무환경개선공사 관련 실정보고(5차)가 있어 先 공사시행 後 설계변경 하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울시설공단 공사감독2처-2963(2020.8.19.)호 (구조체보수보강)

□ 용역개요

〇 공 사 명: 난지물재생센터 근무자운영실 및 작업실근무환경 개선공사

〇 공사기간: 2020. 05. 28 ~ 2002. 10. 31

〇 도 급 비: 1,226,811천원

〇 공사개요: 근무자 운영실(11개소) 리모델링, 부대공 1식

〇 도 급 자: ㈜ 정건  대표 정성준

□ 실정보고 내용 (세부내용 붙임 참조)

〇 감독(서울시설공단) 의견

가. 탈수기계실 슬라브 철근노출 및 슬라브 열화

- 페놀프탈레인 용액 중성화 시험 약 10mm 열화

나. 조치의견 :

- 중성화된 슬라브 10mm 치핑후 철근 피복유지를 위해 30mm 단면복구

- 거더(보) 표면 양호 콘크리트 중성화 방지를 위해 그라인딩 처리후 표면처리

※ 구조검토비 반영(슬라브 높이 약 9m)

- 본 공사는 강관비계를 사용할 수 밖에 없는 경우이므로 ‘공공공사 추락

사고 방지에 관한 지침’에 따라

- 시공자(도급사)가 강관비계의 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획

을 작성하여 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수해야함.

치핑후 철근노출	코아천공 중성화시험	치핑후 중성화 시험

〇 주요 물량 증· 감 내용

구 분	위 치	규 격	단위	당초수량	변경수량	증·감수량	비 고
균열주입 및 단면보수	건조기동외 5동	보수 t=50mm	㎡	124	0	감) 124
		보수 t=30mm		15	0	감) 15
		균열 0.3~0.5mm	m	76	0	감) 76
표면처리	탈수기계실	표면보수	㎡	-	118.4	증) 118.4	스라브
단면보수		30mm	㎡	-	118.9	증) 118.9	스라브
강관비계 설치,철거			㎡	-	914	증) 914
구조검토비			식	-	1	증) 1

〇 개략 공사비 증·감 내용 ---- 증 7,513천원

구 분	개략 공사비 (단위: 천원)				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
공 사 비 (도급비)	54,345	61,858	증)	7,513	제잡비 포함

□ 검토의견

- 예산확보방안 : 최초 침전지 유지보수공사 낙찰차액 및 미집행 잔액 사용 (시설보수과-3328, 2020.9.17.)

- 감독기관(서울시설공단) 실정보고에 대해 승인하고, 추후 물량정산 및 설계변경토록 통보하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.