문서번호	관리과-10558
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
양희원		代이은숙	10/28 정훈모
협조
	주무관		이석근

염소투입동 3차(총인)처리시설 운영제어실 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10

중랑물재생센터

관리과

염소투입동 3차(총인)처리시설 운영제어실 설치 검토 보고

우리 센터 3차(총인)처리시설공사와 관련 운영인력 근무공간과 제어기기 설치공간 부족에 따른 제3처리장 염소투입동내 운영제어실 설치공사 및 센터내 건축시설물 유지보수를 위한 공사에 대해 검토 보고 드림.

1		관련근거

□ 물재생시설과-11705호(2020.9.18.) ‘3차(총인)처리시설 운영제어실 설치 위치 변경 검토’ 관련

: 현재 시공 중인 3차(총인)처리시설 운영제어실 공간 부족으로 별도 공간 설치 필요

기 사용 중인 염소투입동내 여유공간에 대해 리모델링하여 운영제어실로 활용

□ ‘3차(총인)처리시설 운영제어실 인테리어공사’ 협조 요청 관련(운영과-6171호, 2020.9.22.)

2		추진계획

□ 공 사 명 : 3차(총인)처리시설 운영제어실 내부 시설공사 및 옥상 방수공사

□ 공사규모

- 제3처리장 염소투입동 운영제어실 내부 시설공사 1식(면적 약80㎡)

- 제3처리장 염소투입동 및 방류펌프장 옥상방수 1식

□ 소요예산 : 130,000천원

□ 공사내역                                                  (단위 : 천원)

공 종	수 량	소요예산	비 고
운영제어실 내부 시설공사	1식	37,000	면적 약80㎡, 난연판넬 75mm (벽체,천정)
#3처리장 염소투입동 옥상 방수공사	690㎡	38,000	우레탄 방수 1mm
#3처리장 방류펌프동 옥상 방수공사	1,087㎡	55,000	우레탄 방수 1mm

※ 개략공사비로 추후 현장여건에 따라 세부수량 산출 및 공사물량 조정

□ 처리의견

- 제3처리장 염소투입동내 운영제어실 내부 시설공사 및 옥상방수공사, 건축시설물 유지보수공사를 위한 방류펌프동 옥상방수공사에 대해「2020년 건축시설물 유지보수공사(연간단가)」계약업체에 작업지시하여 공사토록 하고 추후 설계변경시 반영 처리.

□ 사업예산 현황                                                 (단위 : 천원)

단위사업명	사업예산			소요예산	예산 부족분	비 고
	본예산	지출예산	집행잔액
건축시설물 유지보수	280,000	220,000	60,000	130,000	-70,000

※ 사업예산 부족사유

- 국가안전대진단 관련 민관합동점검 지적사항(시설보수과-3466호,2020.7.29.)에 따른 방류펌프장 옥상 누수 방수공사 시행 및 3차(총인)처리시설 운영제어실 내부 시설공사에 따른 사업예산 부족

※ 사업예산 부족분에 대해 2020년 공통분야유지보수 수선유지비 사업예산의 예산잔액(낙찰차액) 활용(청계천 좌안2 차집관로 사각형거 보수보강)

3		향후일정

□ ‘20년 10월 ~ 11월 : 운영제어실 설치 및 옥상 방수공사 시행

□ ‘20년 11월 : 공사완료

□ ‘20년 12월 : 설계변경 및 준공 처리

붙 임. 1. 운영제어실 설치 협조요청 공문 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.

3. 평면계획(운영제어실) 1부.

4. 내역서 1부.

5. 국가안전대진단 관련 민관합동점검 결과 1부.  끝.