문서번호	기전과-6172
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이태근		석대창	10/28 변봉섭
협조

『2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제3차작업 완료 및 실정 보고

2020.  10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제3차작업 완료 및 실정 보고

『2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』 제3차 작업지시에 대한 공사를 실시하고 그 결과를 보고드림

		관련근거

□ 3차 작업지시

○ 3차 작업지시 : 기전과5625(2020.10.5)

□ 3차 작업 완료 보고

○ 감리업체 : ㈜트래픽스, TR-본-1028(2020.10.28)호

		공사개요

□ 공 사 명 : 2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관할지역(금천, 관악, 동작구, 서초, 영등포 등)

□ 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 유지보수

□ 계약금액 : 금94,000,000원

□ 시 공 사 : **************

□ 감 리 사 : **************

□ 제3차 작업지시 내용 : 총 49건

○ 작업기간 : 2020. 10. 6. ~ 10.30.

○ 경찰규제 : 09건 - 관악구 봉천로 433 현대시장 입구 유턴표지 설치 등

○ 긴급보수 : 24건 - 사당사거리 고가도로 유턴표지 대형으로 교체 등

○ 일상보수 : 16건 - 관악구 보라매로20 교차로대, 판교체 등

		실정보고

□ 제3차 작업결과 : 총 49건(완료 48건, 미완료 1건)

○ 일상보수 : 47건(완료 46건, 미완료 1건)

<주요작업내용> - 세부사항 “별첨”

지시 번호	구 분	위 치	작 업 내 용	작업 결과	비고
3-01	규제	관악구 봉천로 433 현대시장입구	#311(유턴),보조(적신호시)	완료
3-02	규제	영등포구 영등포동	#311(유턴) 가로등으로 설치	완료
3-03	규제	서초구방배로 함지박사거리 연등 교차로	#329(비보호),보조(적신호시 좌회전가능) 2개소	완료
3-04	규제	관악구 신한은행관악지점앞	#322(횡단보도) 2개소, #322(유턴),보조('↙'신호시)	완료
3-05	규제	동작구 신대방삼거리	#322(횡단보도) 2개소, #322(유턴),보조	완료
3-06	규제	영등포구 대림로	#322(횡단보도)2개소,#322(유턴),보조,#228(양보) #329(비보호),#224(속도'60'),#213(우회전금지),보조	완료
3-07	규제	영등포구 광업진흥공사앞	#322(횡단보도) 2개소	완료
3-08	규제	진흥아파트 교차로	#보조(차량정체시 진입금지),2개소	완료
3-09	규제	삼호가든교차로	#311(유턴), #보조(좌회전신호시,보행자신호시)	완료
3-10	긴급 보수	서초구 사당사거리 고가도로	#311(유턴표지판) 대형으로 교체1 개소	완료

□ 작업 미완료 실정보고 : 1건

<미완료 사항>

지시 연번	구분	위 치	작업지시 내용	미완료 사유
3-11	긴급 보수	서초구 서리풀 터널 진출입 도로구간	#303(자전거 보행자겸용) 철거	기 작업완료

□ 예산현황

구 분		계약금액	기 작업금액	금회 작업금액	계약잔액
총공사비		94,000,000	65,670,300	23,760,000	4,533,700
도급비	공 급 가 액	85,454,546	59,733,000	21,600,000	4,121,546
	부가가치세	8,545,454	5,937,300	2,160,000	412,154
	계	94,000,000	65,670,300	23,760,000	4,533,700

□ 책임감리원 검토의견

○ 금회 3차작업 대상 49건 중 48건을 완료하였으며 미완료 작업지시 1건(연번3-11)은 기 작업완료 되어 실지 작업지시 된 공사물량에 대해서는 작업완료 하였음

※ 붙 임 - 책임감리원 완료보고서(검토서, 내역서, 관련사진 등)

		보고자의견

□ 책임감리원 실정보고 검토 결과

○ 제3차 작업지시 총 49건 중 48건을 완료하였으며 미완료 사항 1건은 기 작업완료 된 사항으로 금번작업에서 제외코자 하며,

○ 경찰청 규제심의 사항 및 일상 유지보수 공사는 계속 실시하여 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 책임감리원 작업완료 보고서 및 감리조서 1부.  끝.