투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 계약기간 변경 의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

중랑물재생센터 총인처리시설 설치사업에 소요되는 관급자재에 대해 아래와 같이 계약기간 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	품명	계약자		계약번호	계약금액(원)	계약기간
1	응집조 및 방류혼합수로 교반기	창신기계제작소		12182137300	439,100,000	당초	2018.10.05. ∼2020.10.31
						변경	2018.10.05. ∼2020.12.31
2	크레인 및 호이스트	(주)디케이엠엔이		20181112DDB00	115,021,700	당초	2018.11.29. ∼2020.10.31
						변경	2018.11.29. ∼2020.12.15
3	약품저장탱크 (장기)	화신에프알피산업	총차	2019121386C00	591,340,420	당초	2019.12.24. ∼2020.10.31
						변경	2019.12.24. ∼2020.11.30
			1차	2019121386C00	46,609,200	당초	2019.12.24. ∼2020.10.31
						변경	2019.12.24. ∼2020.11.30
			2차	2020020CE1C00	544,731,220	당초	2020.02.18. ∼2020.10.31
						변경	2020.02.18. ∼2020.11.30

1. 변경내용

2. 변경사유: 선행공종(토목) 지연에 따른 설치시기 미도래

3. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임: 1) 관급자재 납품기간 연장 검토서 1부

2) 합의각서 각 3부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	10/23 이달영
협조자
시행	설비부-16368	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)