투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)솔토지빈건축사사무소
(경유)
제목	설계용역 (준공서류)납품 독촉

1. 귀 사의 평소 업무협조에 감사드립니다.

2. 귀사와 서울특별시(도시기반시설본부)간 용역계약체결·진행중인“서울시속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역”과 관련, 아래와 같이 준공납품일자가 도래되었음에도 납품되지 않고 있어 공사업무(착공) 등에 막대한 지장을 초래하고 있으니 조속히 (납품)처리하여 주시기 바랍니다.

- 아                       래 -

가. 용 역 명 : 서울시속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역

나. 계약일자 : 2019.7.29.

나. 준공일자 : 2020.9.16.(당초:2020.7.28.)

※ 납품불가사유 및 납품예정일자에 대하여‘20.11.2(월)까지 제출하기 바람.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김성		건축총괄과장	유현수		건축부장	10/23 이창구
협조자
시행	건축부-17911	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)