투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(1차 4회) 및 준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역)

우리부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사 건설페기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차 4회) 및 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

2. 계약금액 : 432,715,300원(1차 209,374,000원)

3. 용역기간 : 2019.4.1. ~ 2020.12.31.(1차 2019.4.1. ~ 2020.10.31.)

4. 계 약 자 : ㈜삼양이앤디 외 1개사(대표 최훈성)

5. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	432,715,300원	432,715,300원	변경 없음
	1차	209,374,000원	151,390,000원	감 57,984,000원

- 변경사유 : 공사여건 변동에 따른 폐기물 처리수량 변경

6. 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	증·감
용역 기간	총차	2019.4.1.~ 2020.12.31.	2019.4.1.~ 2021.6.30.	증 181일
	1차	2019.4.1.~ 2020.10.31.	2019.4.1.~ 2020.10.31.	변경 없음

- 연기사유 : 공사 준공일(2021.6.30.) 변경에 따라 원활한 공사 추진(폐기물 처리)을 위하여 용역 준공기한 연기 필요

7. 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(1차 4회) 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	10/26 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-14867	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)