코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	건설폐기물 처리용역 계약변경 요청(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사)

재무과-6761(2019.2.12.)호와 관련한 “남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 건설폐기물 처리용역”에 대하여 계약기한 변경(연장) 및 폐기물수량 증가에 따른 변경계약을 아래와 같이 요청드리니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약일자: 2019.2.13. (계약번호: 201902032C5-00)

다. 계약상대자: 남부이앤티(주)

라. 변경계약사항

구 분	변경전	변경후	비 고
폐기물처리비	**********	**********	************
계약기간	’19.2.13.~’20.12.12.	’19.2.13.~’21.12.12.	12개월 연장

마. 귀책사유: 우리시(공사기간 연장)

붙임  1. 당초 용역계약서(참고용) 1부

2. 건설폐기물 설계변경 보고서 1부

3. 설계변경 내역서 1부

4. 합의각서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	10/26 안중호
협조자
시행	한양도성도감-10710	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)