문서번호	한양도성도감-10699
결재일자	2020. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬	이원재	10/26 안중호
협 조

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토보고

2010.10.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」

건설폐기물 처리용역 설계변경 검토보고

□ 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 공사현장내 매립되어 있던 폐기물이        많아 처리물량이 증가하였으므로 설계변경 처리하고,

□ 전시관리실 재설계에 따른 공사지연으로 건설폐기물 처리용역 기간을 연장      하고자 함

□ 용역개요

□ 용 역 명  : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 공사 건설폐기물 처리용역

□ 위    치  : 중구 회현동1가 100-267 일대

□ 계 약 금 : **********

□ 용역기간 : 2019년 2월 13일 ~ 2020년 12월 12일

□ 용역내용 : 건설폐기물 수집·운반 및 처리량

(단위: 톤)

합 계	혼합건설폐기물	폐콘크리트	식물성잔재류	건축폐재류
452	15	388	39	10

□ 계약 대상자

- 상  호 : 남부이앤티*********************

- 주  소 : 서울시 중랑구 중화동 23-1, 101호

□ 추진경위

□ 2019. 2. 12. : 폐기물처리용역 계약

□ 2019. 2. 13. : 용역 착수

□ 2020. 1. 14. : 용역기간 변경계약(용역기간 12개월 연장)

□ 2020. 10.22. : 용역사 설계변경 합의각서(금액 및 용역기간 연장) 제출

□ 변경내용

□ 폐기물 증가량

(단위: 톤)

구 분	변경전	변경후	증가량
혼합건설폐기물	15	18	3
폐콘크리트	388	1,370	982
식물성잔재류	39	-	- 39
건축폐재류	10	66	56
합 계	452	1,454	1,002

□ 변경금액 및 계약기간

구 분	변경전	변경후	비 고
폐기물처리비	**********	**********	**********
계약기간	’19.2.13.~’20.12.12.	’19.2.13.~’21.12.12.	12개월 연장

□ 처리의견

□ 실제 반출한 폐기물량과 합의각서의 계약기간과 같이 설계변경 처리하고자 함

□ 예산과목: 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 보수정비, 시설비

********************************************************************

붙임  1. 설계변경(정산)내역서 1부

2. 설계변경 합의각서 1부

3. 건설폐기물 반출수량 확인서 1부.  끝.