코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	e호조 지출품의등록(한양도성 유적전시관 건설폐기물 처리용역 변경계약)

“남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 건설폐기물 처리용역”에 대하여 계약기한 변경(연장) 및 폐기물수량 증가에 따른 변경계약을 위해 e호조 품의 등록을 하고자 합니다.

가. 계약건명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약일자: 2019.2.13. (계약번호: 201902032C5-00)

다. 계약상대자: 남부이앤티(주)

라. 변경계약사항

구 분	변경전	변경후	비 고
폐기물처리비	**********	**********	************
계약기간	’19.2.13.~’20.12.12.	’19.2.13.~’21.12.12.	12개월 연장

마. 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 보수·정비, 시설비및부대비, 시설비

주무관							왕승찬			도성관리팀장					이원재					한양도성도감과장					10/27 안중호
협조자
시행			한양도성도감-10770									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-2671						/전송			02-2133-1063					/	vivawang@seoul.go.kr												/	부분공개(6)