문서번호	도시철도사업부-10587
결재일자	2020. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신림선과장	도시철도사업부장
이나영		권영민	10/29 이철
협 조
	주무관			오상협

『신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)』

휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 검토 보고(´20년 11월)

2020. 10.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)』

휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 검토 보고(´20.11월)

신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구) 관련 ´20년 11월 휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

□ 휴일 및 연장 근무 승인 요청내용

□ 관련 근거 : 신림신성-2020-510호(´20.10.29.)

□ 휴일 근무 : 총 8일

- 11.1(일)/11.7(토)/11.8(일)/11.14(토)/11.15(일)/11.21(토)/11.28(토)/11.29(일)

□ 연장 작업 : ‘20.11.1. ~ 11.30.(미시행 : 넷째 일요일)

□ 휴일 및 연장 근무 계획

□ 관련근거

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제3장 제5절 4.0 (휴일 및 야간작업)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.2 (휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.3 (휴일 및 야간작업 근무 요령)

□ 휴일 및 연장 근무 사유

- 장비, 기능공의 적정 운영 및 연속적인 작업시행을 통해 정거장, 터널 구조물 공정을 신속하게 추진하여 공정 만회

- 유동인구 최소 시간을 고려 연속작업으로 신속히 추진하므로서 교통소통 조기 정상화 및 시민불편 해소에 만전

□ 적정성 및 비용 부담

【휴일 근무】

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ´13.11.14.)

□휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇨ 시공사 귀책은 시공사에서 대가 지급

- 건설사업관리기술단 검토 의견

□휴일작업 사유 : ‘시공사 귀책으로 인한 휴일근무’임을 명기(시공사)

【연장 근무】

- 야간근무는 주․야간으로 산출된 공사비에 의거 감리대가를 산출하였으므로 추가지급 제외 (입찰안내서 제6장 6.2.1)

- 용역계약일반조건 Ⅴ.4.나항목 단서조항에 의한 작업일 경우 감리원은 대체휴무하고 근로기준법에서 정한 1.5배의 기준은 적용하지 않는다.

□용역계약일반조건 Ⅴ.4.나 : 계약상대자는 발주기관과 협의하여 야간작업을 하는 경우 추가비용을 청구할 수 없다.

□ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정

□ 휴일 및 연장 근무 주요내용

【휴일 근무】

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		근무자
11.01(일)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	110E환기구	· 탑 슬라브 철근 조립	***
		111정거장	· 환기구 벽체 철근조립 및 보조파일 설치 등
11.07(토)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	109정거장	· 14터널 라이닝 콘크리트 타설 등 · 탑 슬라브 동바리, 철근조립, 거푸집 설치 등	***
		#4작업구	· 터널 라이닝 철근조립, 콘크리트 타설
		110정거장	· 탑 슬라브 철근조립, 동바리, 거푸집 설치 등
		110E환기구	· 탑 슬라브 철근조립, 동바리, 거푸집 설치 등
		111정거장	· 환기실 1단 벽체 거푸집 설치, 환기구 덕트 콘크리트 타설 등 · 외부 출입구 토공굴착 및 가시설 설치
11.08(일)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	110E환기구	· 탑 슬라브 거푸집 설치	***
		111정거장	· 환기실 벽체 철근조립 및 보조파일 설치 등
11.14(토)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	109정거장	· 14터널 라이닝 철근조립 및 콘크리트 타설 · 탑 슬라브 동바리, 철근조립, 거푸집 설치 등	***
		#4작업구	· 터널 라이닝 철근조립, 콘크리트 타설
		110정거장	· 탑 슬라브 철근조립, 상부 슬라브 방수 등
		110E환기구	· 상부 슬라브 방수
		111정거장	· 가시설 해체 및 상부슬라브 방수 등 · 외부 출입구 토공굴착 및 가시설 설치

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		근무자
11.15(일)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	109정거장	· 14터널 라이닝 철근조립 · 탑 슬라브 동바리, 철근조립, 거푸집 설치 등	***
		#4작업구	· 터널 라이닝 철근조립
		110정거장	· 탑 슬라브 철근조립, 상부 슬라브 방수 등
		110E환기구	· 상부 슬라브 방수
		111정거장	· 환기구 동바리 설치 및 되메우기 등 · 외부 출입구 토공굴착 및 가시설 설치
11.21(토)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	109정거장	· 14터널 라이닝 철근조립 및 콘크리트 타설 · 중앙기둥 철근 및 거푸집 설치, 가시설 해체 등	***
		#4작업구	· 터널 라이닝 철근조립 및 콘크리트 타설
		110정거장	· 탑 슬라브 콘크리트 타설, 상부 슬라브 방수 등
		110E환기구	· 상부 슬라브 방수
		111정거장	· 환기구 슬라브 철근조립 및 되메우기 등 · 외부 출입구 토공굴착 및 가시설 설치
11.28(토)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	109정거장	· 14터널 라이닝 철근조립 및 콘크리트 타설 · 중앙기둥 철근 및 거푸집 설치, 상부슬라브 방수 등	***
		#4작업구	· 터널 라이닝 철근조립 및 콘크리트 타설
		110정거장	· 상부슬라브 방수, 출입구 연결통로 콘크리트타설 등
		110E환기구	· 환기구 덕트 및 지장물 받침 거푸집 설치
		111정거장	· 환기구 슬라브 동바리 설치 및 되메우기 등 · 외부 출입구 토공굴착 및 가시설 설치
11.29(일)	주간 (건설사업 관리기술자1인)	109정거장	· 14터널 라이닝 철근조립 · 중앙기둥 철근 및 거푸집 설치, 출입구 연결통로 보호벽 거푸집 설치 등	***
		#4작업구	· 터널 라이닝 철근조립
		110정거장	· 상부슬라브 방수, 보조 파일 설치 등
		110E환기구	· 환기구 덕트 및 지장물 받침 거푸집 설치
		111정거장	· 환기구 슬라브 동바리 설치 및 되메우기 등 · 외부 출입구 토공굴착 및 가시설 설치

【연장 근무】

근무일자	근무자	근무형태	시공사 연장작업 주요내용
11월1주차 (11-01)	주52시간 준수 범위 내 연장근무 및 다음날 주간 유연 근무 시행	연장 (건설사업관리 기술자1인)	109정거장 110정거장 110E환기구 111정거장	· 철근 조립 · 거푸집 설치 · 동바리 설치 및 해체
11월2주차 (11-02 ~ 11-08)
11월3주차 (11-09 ~ 11-15)
11월4주차 (11-16 ~ 11-21)
11월5주차 (11-23 ~ 11-30)

□ 검토 결과

□ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 및 연장 작업 승인조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무 계획을 승인코자 함.

< 건설사업관리기술자 휴일 및 연장 작업 승인조건 >

- 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

- 연장작업에 소요되는 건설사업관리기술자 추가 대가 제외

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 소음․먼지․통행 불편 등 불편사항이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 본부 안전관리과에서 안전사고 위험 현장 지적․안내와 관련하여 지적사항은 즉시 조치하고, 반복 지적되지 않도록 현장관리 요망

- 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 및 연장 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

- [근로자 안전 10계명], [안전시공 10대 항목] 준수 철저

- 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 현장 안전관리 철저

※ 기배부한 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 「사업장 대응지침」 및 「건설현장 대응 가이드라인」이행 철저

붙  임 : 1. 휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 요청 공문 1부

2. 11월 감리원 근무 계획(주 52시간 준수) 1부.  끝.