문서번호	도시철도토목부-11281
결재일자	2020. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		허동	10/29 최병훈
협 조
	주무관			김현오

『신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

계약금액 변경 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 건설사업관리용역」

계약금액 변경 검토 보고

신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 공정 및 안전관리 확보를 위한 건설사업관리기술인 추가 투입계획에 따른 계약금액 변경  검토 보고임.

※ 도시철도토목부 – 9456호(2020.9.11.) 건설사업관리기술자 추가투입 계획보고

용역사 철도2부2020 - 9326호(2020.10.26.) 계약금액 변경 요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 구    간 : 영등포구 여의도동 ~ 관악구 신림동

○ 규    모 : 궤도부설 16.7kn(단선기준), 분기기 부설 18개소

○ 용역기간 : 2019.10.28. ~ 2022.02.27.

○ 계약금액 : 1,013,330천원

○ 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링(75%), ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소(25%)

□ 계약현황                                            (단위:천원)

구 분	총 차	1차	2차	잔여 차수
용역기간	‘19.10.28∼ ‘22.02.27	‘19.10.28∼ ‘19.12.31.	‘20.01.01∼ ‘20.12.31.	‘21.01.01∼ ‘22.02.27.
용역금액 (천원)	1,013,330	78,900	596,400	338,030

□ 보고내용

○ 건설사업관리기술인 추가 투입계획에 따른 초급 기술인 4.9 인·월  추가투입

□ 계약금액 검토                                           (단위:천원)

구 분		총 차	1차	2차	잔여 차수
용역금액 (천원)	당초	1,013,330	78,900	596,400	338,030
	변경	1,078,440	78,900	650,520	349,020
	증·감	증65,110	-	증54,120	증 10,990
용역기간	변경 없음	‘19.10.28. ～ ’22.02.27.	’19.10.28. ～ ‘19.12.31.	‘20.01.01. ～ ’20.12.31.	‘21.01.01. ～ ’22.02.27.

□ 기술인 변경 검토내용

○ 건설사업관리기술인 배치 조정                             (단위: 인·월)

구 분	총 차		2019년(1차)		2020년(2차)		2021년 이후
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
책임 기술인(고급)	20.0	20.0	2.2	2.2	12.0	12.0	5.8	5.8
분야별 기술인(중급)	29.4	29.0	1.9	1.9	19.6	18.5	7.9	8.5
분야별 기술인(초급)	8.0	13.3	-	-	6.8	8.0	1.2	5.4
소 계	57.4	62.3	4.1	4.1	38.4	38.5	14.9	19.7
기술지원기술인 (궤도, 특급)	3.2	3.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.6	1.6
기술지원기술인 (안전, 고급)	1.9	1.9	0.2	0.2	0.8	0.8	0.9	0.9
소 계	5.1	5.1	0.4	0.4	2.2	2.2	2.5	2.5
합 계	62.5	67.4	4.5	4.5	40.6	40.7	17.4	22.2

□ 조치계획

○ 상기의 검토 내용과 같이 “신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역”의 계약금액 변경을 시행하고자, 계약부서(총무부)에 계약변경을 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리 기술자 추가투입 방침서 1부.

2. 계약금액 변경 요청 공문 1부.  끝.