의원 요구 자료 제출

시 행	주거재생과-12445
결재일자	2019.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,재생정책과장

주무관		주거재생정책팀장	주거재생과장	재생정책기획관	도시재생실장	결재
이기명		신윤철	양준모	양용택	10/16 강맹훈
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3127번, 김승희의원, 보건복지위원회)

의원님께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 김승희 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김승희 의원(보건복지위원회, 자유한국당)

□ 요구번호: 3127번

□ 요구내용

1. 서울시 양천구 도시재생 뉴딜사업 관련

가. 사업기간별 계획중인 사업 내용

나. 사업비의 상세내역(마중물사업비, 타부처 연계사업비 포함) 및 해당 사업비의 지급(또는 배정) 예정시기

따로붙임: 서울시 양천구 도시재생 뉴딜사업 내용 1부(19년 특위 심의자료).  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (주거재생과)	담당사무관	신 윤 철
	☎02-2133-7167	주무관	이 기 명
	작 성 일 : 2019. 10. 16

≪붙임≫ 서울시 양천구 도시재생 뉴딜사업 내용

□ 사업 총괄표

구분	단위 사업	세부사업		사업비(억원)								사업기간
				계	마중물		부처연계		자체 지방비	공기업	기금
					국비	지방비	국비	지방비
총 합계				571.44	100.0	150.0	62.12	145.23	74.09	30.0	10.0
마중물사업	합 계			290.0	100.00	150.00				30.00	10.0
	시장활력	계		83.10	32.64	50.46
		목3동 깨비시장 장소특화사업	H/W S/W	35.30	14.03	21.27						‘20~23
		시장연계형 커뮤니티 도서관 및 아이키움센터	H/W	46.10	18.44	27.66						‘20~23
		스마트 마을주차 시스템 구축	H/W S/W	1.70	0.17	1.53						‘22~23
	마을활력	계		146.90	35.86	71.04				30.00	10.00
		목3동 커뮤니티 라운지	H/W S/W	36.00	7.50	28.50						‘20~23
		청년주택 및 주차장 복합화	H/W S/W	101.20	24.48	36.72				30.00	10.00	‘20~23
		목3동 안전한 등굣길 조성 프로젝트	H/W	9.70	3.88	5.82						‘21~23
	정주활력	계		60.00	31.50	28.50
		집수리 원스톱 서비스센터 구축 사업	H/W S/W	15.00	9.00	6.00						‘21~23
		사람 중심의 골목길 환경정비	H/W	42.00	21.00	21.00						‘21~23
		목3동 주거지 경관 통합마스터플랜 수립	S/W	3.00	1.50	1.50						‘20
지자체 사업	합 계			74.09					74.09
	목제1구역 기부체납공원 지하주차장 건설			69.87					69.87			‘19
	노후 지선하수관로 개량사업			3.78					3.78			‘19
	행복학습센터 운영			0.44					0.44			‘19
부처연계 사업	합 계			207.35			62.12	145.23
	전통시장 주차환경 개선사업 목동깨비시장 공동주차장 및 공유센터 건립		중기부	175.0			59.0 (미적용)	116.0				‘18~’21
	목3동공원어린이집 건립		복지부	32.35			3.12	29.23				‘19~’20

□ 마중물사업 세부내용

구분	사업명		주관기관 /부서	총 사업비	마중물		부처연계		자체 지방비	기타		기금	단계별 재원 투입					비고
													기 투입	’20	’21	’22	’23
					국비	지방비	국비	지방비		공기업	민간
합 계				290.0	100.0	150.0				30.0		10.0		23.5	84.58	83.86	98.06
A 시장활력	( 소 계 )		양천구	83.1	32.64	50.46								7.2	17.2	23.0	35.7
	A-1 목3동 깨비시장 장소특화사업	깨비시장 보행자중심거리 조성사업 (HW)		15.3	6.12	9.18								0.3		1.0	14.0
		시장상인 역량강화 프로그램 (SW)		8.0	3.2	4.8										4.0	4.0
		깨비시장 정기 축제 기획 및 운영 (SW)		12.0	4.8	7.2								3.0	3.0	3.0	3.0
	A-2 시장연계형 커뮤니티 도서관 및 아이키움센터	커뮤니티 도서관 및 아이키움센터 조성 (HW)		46.1	18.44	27.66								3.9	14.2	14.0	14.0
	A-3 스마트 마을주차 시스템 구축	어플리케이션 개발 (SW)		1.0	0.1	0.9										1.0
		스마트 센서 부착 (HW)		0.7	0.07	0.63											0.7
B 마을활력	( 소 계 )		양천구	146.9	35.86	71.04				30.0		10.0		13.3	46.38	38.86	48.36
	B-1 목3동 커뮤니티 라운지	주민역량강화 및 공모사업 추진 (SW)		7.5	7.5										2.5	2.5	2.5
		활성화계획 수립(변경) 및 공동체 활성화 용역비(SW)		16.0		6.0								7.0	3.0	3.0	3.0
		도시재생 현장지원센터 조성 및 운영 (HW+SW)		7.7		7.7								2.3	1.8	1.8	1.8
		도시재생 거점공간 조성 및 운영 (HW+SW)		2.8		2.8								1.0	0.6	0.6	0.6
		거버넌스 운영 (SW)		2.0		2.0								0.5	0.5	0.5	0.5
	B-2 청년주택 및 주차장 복합화	청년주택(임대주택) 개발 (HW)	양천구/ 공기업(LH)	30.0						30.0					10.0	10.0	10.0
		도시재생거점 및 공영주차장조성(HW+SW)		71.2	24.48	36.72						10.0		2.5	37.78	30.46	30.46
	B-4 안전한 등굣길 조성 프로젝트	안전한 통학로 조성 사업 (HW)	양천구	9.7	3.88	5.82									0.2		9.5
C 정주활력	( 소 계 )		양천구	60.0	31.5	28.5								3.0	21.0	22.0	14.0
	C-1 집수리 원스톱서비스센터 구축	집수리 상담 프로그램 운영 (SW)		6.0	3.6	2.4									2.0	2.0	2.0
		가꿈주택 지원사업 (HW)		9.0	5.4	3.6									3.0	3.0	3.0
	C-2 사람중심의 골목길 환경정비	골목길 환경정비 사업 (HW)		40.0	20.0	20.0									16.0	16.0	8.0
		골목길 그린패치 프로젝트 (HW)		2.0	1.0	1.0										1.0	1.0
	C-3 목3동 주거지 경관 통합마스터플랜 수립	통합마스터플랜 수립 용역비(SW)		3.0	1.5	1.5								3.0