문서번호	서북권사업과-9842
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	개발기획팀장	서북권사업과장		지역발전본부장
전수미	강종삼	차창훈		12/04 정수용
협 조
	주무관		장종희

- 수색역 일대 개발전략 및 사업추진방안 수립 용역 -

용역 준공기한 연기 검토보고

2017. 12.

지역발전본부

(서북권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 수색역 일대 개발전략 및 사업추진방안 수립 용역 -

용역 준공기한 연기 검토보고

코레일과 공동용역 시행중인「수색역 일대 개발전략 및 사업추진방안 수립」용역에 대해 코레일의 준공기한 연기요청(3개월) 및 전문가 자문회의  결과 등의 반영을 위해 다음과 같이 준공기한을 연장하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 수색역 일대 개발전략 및 사업추진방안 수립

○ 용역기간 : 2016년 11월 9일 ~ 2017년 12월 28일(총차)

- 1차년도 ’16.11.9~’17.6.27  /  2차년도 ‘17.6.28~’17.12.28

○ 계약금액 : 445백만원 (서울시&코레일 1:1 매칭)

○ 용역기관 : ㈜유아컨설턴트종합건축사사무소(대표 신규식)

○ 주요 과업내용

- 수색역 일대 비전 및 중장기 발전방향 마련

- 수색역 일대 통합개발 전략 및 실현가능한 구체적인 사업추진 방안 마련

- 철도역세권 등 개발 가능한 유휴부지(서북권역) 조사･분석 및 사업화 방안

- 공공기여 부담방안 결정 등 사전협상 방안

□ 추진경위

○ `16. 9. 6. : 서울시-코레일간 공동용역협정서 체결

○ ‘16.11. 9. : 용역계약 및 착수

○ ‘16.12. 7. : 착수보고 및 전문가 자문

○ ‘17. 6.20. : 용역 중간 보고

○ ‘17. 9.27. : 행정2부시장 보고

○ ‘17.11.24. : 용역기한 변경요청(코레일)

□ 준공기한 연장

○ 변경내용 : 준공기한 연기(90일)

구 분		기 정	변 경	비 고
계약 금액	총차	444,120,000원	444,120,000원	변경 없음
	2차	222,500,000원	222,500,000원	변경 없음
과업 기간	총차	2016.11. 9. ~ 2017.12.28	2016.11. 9. ~ 2018. 3.28	증 90일
	2차	2017. 6. 28. ~ 2017.12.28	2017. 6.28. ~ 2018. 3.28	증 90일

※ 1차 용역 준공 정산 시 880천원 감(직접경비 정산)하여 전체(총차) 계약금액 변경(445,000천원→444,120천원)

○ 귀책사유 : 발주기관(서울특별시 및 코레일)

○ 지연배상금 부과 여부 : 미부과

○ 변경사유(기한연장)

- 수색역 일대 철도시설 이전(일정 등)계획이 확정되지 않아 사업부지 경계 및 이전과 연계된 기본구상의 변동 가능성이 있어 용역기한 연장필요

과업내용서

철도시설 및 차량기지 이전의 여건변화(근거리 또는 원거리 이전)에 따른 단계별 개발방향 수립

(코레일 요청)

- 수색·증산 재정비촉진지구, 수색로변 민간부지 및 유휴부지와 상암 DMC간 기능적, 물리적 연결 등 종합계획 필요(‘17.9.27. 행정2부시장 및 전문가 자문회의 결과) ☞ 수색역 일대(주변포함) 구상도 등 작성

과업검토 및 자문회의 결과 조치

① 계약상대자는 전문가 등의 협력, 지원, 자문시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치  계획을 보고하고, 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 과업내용에 반영하여야 한다.

<붙임>

1. 용역 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 관련공문(코레일 공문 및 과업연기원·합의각서) 1부. 끝.