문서번호	계약심사과-18810
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
조성도		노형근	11/01 김수정
협 조

마포아트센터 리모델링사업 기본 및 실시설계 설계경제성 심사(VE) 실행계획

2019. 11.

재 무 국

[계약심사과]

마포아트센터 리모델링사업 기본 및 실시설계

설계경제성 심사(VE) 실행계획

마포구청 문화예술과 시행「마포아트센터 리모델링사업 기본 및 실시설계」에 대해 설계VE전담팀을 구성하고, 설계경제성 심사(VE)를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 설계경제성 심사 신청(마포구청 문화예술과-4982. ‘19. 10. 29.)

2		심사 요청 개요

□ 신청부서 : 마포구청 문화예술과

□ 사 업  명 : 마포아트센터 리모델링사업 기본 및 실시설계

□ 위    치 : 마포구 대흥로20길28(대흥로30-3)

□ 사업내용

- 주 용 도 : 문화시설(공연장)

- 부지면적 : 8,388㎡

- 규    모 : 지하2층~지상5층 연면적 20,752.71㎡

□ 공 사 비 : 16,217백만원

□ 사업기간 : ’17. 10. ~ ’21. 7.

□ 설계공정률 : 75%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진 방법 : VE전담팀을 구성하여 설계경제성 심사(VE)

○ VE심사팀, 발주부서, 설계사 등 20명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸노형근 토목심사2팀장 계약심사과 ▸조성도 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸김성훈 아이엠이엔에이	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸장경태 요원 아이엠이엔에이	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (5개 분야)	▸(건축시공) 박의수 위원 희림종합건축사사무소 ▸(건축구조) 김영길 위원 동양구조기술사사무소 ▸(전 기) 조계술 위원 중부대학교 ▸(기 계) 김경찬 위원 해안종합건축사사무소 ▸(무대기술) 도명호 위원 한국문화예술위원회	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	▸김동우 주무관 마포구청 문화예술과	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(10명)	▸송석환 이사 ㈜사람과문화 건축사사무소	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
’19. 11. 25.(월) 10:00~17:00	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 마포아트센터 회의실
’19. 11. 26.(화) 10:00~17:00	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣ 장소 : 마포아트센터 회의실
’19. 12. 3.(화) 10:00~17:00	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정 ‣ 장소 : 마포아트센터 회의실
’19. 12. 4.(수)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (계약심사과 ⇒ 마포구청 문화예술과)
’19. 12. 11.(수)	- VE 제안 채택결과 회신 (마포구청 문화예술과 ⇒ 계약심사과)
’19. 12. 18.(수)	- 설계경제성 심사(VE) 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 마포구청 문화예술과)

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19. 10. 29.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19. 11. 1.		설계경제성 심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 경 제 성 심 사 (VE) 운 영		’19. 11. 25. ~ ’19. 12. 3. (1일차~9일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2,3차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의
		’19. 12. 4. (10일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸설계경제성 심사(VE) 제안서 통보
		’19. 12. 11. (17일차)		VE 제안 채택결과 회신 (발주부서 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사(VE) 제안서 수용 여부 결정 및 통보
		’19. 12. 11. ~ ’19. 12. 17. (23일차)		설계VE 심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 심사 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’19. 12. 18. (24일차)		설계VE 심사결과 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요 예산

□ 총금액 : 9,417천원

○ 외부위원 수당 : 8,917천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,472천원(2,472천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 5,695천원(1,139천원 × 5명)

- 진행보조요원(초급기술자)    : 750천원(750천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(마포구청 문화예술과)

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후 계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보----------- ’19. 12. 18.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.