문서번호	건축부-18502
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김성권		차무흥	11/02 이창구
협조	주무관		김재호
	주무관		이준범

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

케이싱, 가이드빔 설치 실정보고 검토

2020. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

가이드빔, 케이싱 설치 실정보고 검토

********************************************************************************************

※ 관련근거 : 광역CM-040호 가이드빔 설치 반영 요청에 따른 실정보고

광역CM-045호 케이싱 설치 및 해체 반영에 따른 실정보고

1		공사개요

○ 위     치 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 9 (성수동2가 277-34호)

○ 규     모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,709.89㎡

○ 용     도 : 공장, 업무시설,근린생활시설

○ 공사기간 : ****************************************************

○ 시 공 자 : 세이브건설㈜(대표:한상열) 외2

○ 감 리 자 : ㈜포스코A&C건축사사무소, ㈜비전이엔지기술사사무소

2		보고(검토)내용

*******************

*********************************************************************

********************************************

****************

******************************************************************************

3		감리단 의견

***************************************************************************.

4		공사비 변경 현황

***********

공 종	규 격	도 급 비(원)		증 · 감	비고
		당 초	변 경
케이싱 설치	H-300×300	0	1,775,191	증) 1,775,191
가이드빔 설치	Ø400	0	21,617,093	증)21,617,093
소 계			23,393,284	증)23,392,284
직접공사비			23,393,284	증)23,392,284

5		검토결과

*****************************************************************************************

********************************************************************************************

- 지반조사결과 지하수위가 존재하는 위치(GL-11.0~11.5m)토질이 모래를 포함한 자갈층으로, 이는 천공작업시 쉽게 교란됨에 따라 공벽이 붕괴되는 현상을 시험천공을 통해 확인함.

6		검토자 의견

******************************************************************************************************************

*****************************************************************************

따로붙임 : 1)케이싱튜브 설치 및 해체 반영 요청에 따른 실정보고 1부.

2)흙막이 공사 Guide Beam 설치 반영 요청에 따른 실정보고 1부.  끝.