문서번호	토목부-21077
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	11/02 김용제
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

아산병원 앞 보도블럭정비 설계반영 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

아산병원 앞 보도블럭 정비 설계반영 검토보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』의 당초 계획된 아산병원 앞 보도블럭 정비공사와 관련하여 관리부서인 송파구청(도로과, 공원녹지과)과 협의하고 변경사항이 발생하여 최종 설계변경에 반영하고자 보고드림.

Ⅰ		관련 근거

○ 아산병원 앞 보도블럭 정비 설계반영 검토보고

【올대감 20-244(‘20.10.26.)호】

Ⅱ		사업 개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘21. 12. 31.

○ 총사업비 : 전체 50,791백만 원 (‘20년 : 11,200백만 원)

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 83.7%

Ⅲ		추진 경위

◦ '18.11.16. : 민원접수(올림픽현대아이파크)

- 민원내용 : 한가람로를 통한 올림픽대로 접근성 확보

◦ '19.05.31. : 제1차 사업계획변경 조정심의회 개최(행정2부시장외 6명)

- 심의결과 : 교통편익과 안전을 확보하는 방안으로 계획변경 “적정”

◦ '19.06.10. : 사업계획 변경(도로계획과)

◦ '19.08.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 착수

◦ '19.11.29. : 주민간담회 개최

◦ '20.09.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 완수

Ⅳ		검토 내용

○ 본 사업과 관련하여 당초 계획에 포함된 아산병원 앞 보도블럭 정비공사와 관련하여 도로관리 부서인 송파구청(도로과, 공원녹지과)과 협의결과,

○ 아래와 같이 스톤블록포장 및 측구수로 등의 반영으로 인해 변경설계가 필요하며 이에 대한 검토보고 임

○ 아산병원 앞 보도블럭정비 변경검토 구간

- 보도블럭포장 내역 : 스톤블록포장, 측구수로 등

- 기존 보도부 정비계획(안)

「보도블럭 정비계획 위치도」

구분	내용설명
평면도
횡단도

아산병원

올림픽대로

「보도정비계획 요약도」

A-A단면	B-B단면	C-C단면

아산병원

올림픽대로

◦ 주요변경 내역

- 측구수로관     : [당초]  - m  → [변경] 42m(증: 42m)

- 도로경계석     : [당초]  - m  → [변경]206m(증: 206m)

- 보행안전도우미 : [당초]  - 인  → [변경] 48인(증: 38인)

- 기타(부대공 등)     :  보도블럭 정비에 따른 공종별 수량증가

◦ 공사비 증.감 검토

- 단가적용 : 공사관리일반조건(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

⦁ 신규비목 : 1) 설계단가    × 협의율적용(85.98%)

2) 표준시장단가 × 100%적용

- 항목별 세부 단가검토

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 토 공
기존구조물깨기	기계100%	m3		11	11		218	218
보도블럭 헐기	T=30cm미만	m2	68	100	32	128	189	61
o 배수공사
측구수로관		m		42	42		6,821	6,821
집수정 및 우수받이외		식	1	1	1	6,132	9,209	3,077
o 포장공
스톤블럭포장		m2	68	100	32	1,762	2,591	829
도로경계석		m		206	206		4,563	4,563
골재외		식	1	1	1	167	250	83
o 부대공
안전시설비		ea		97	97		2,611	2,611
보행안내 도우미		인		48	48		5,736	5,736
폐기물처리		ton	9	38	29	10	41	31
직 접 비						8,199	32,228	24,029
간 접 비						4,201	13,672	9,471
도 급 비						12,400	45,900	33,500
관 급 비						1,350	5,060	3,710
총공사비						13,750	50,960	37,210
폐기물처리비						220	934	714
총사업비						13,970	51,894	37,924

Ⅴ		조 치 계 획

○ 책임건설사업관리기술자의 실정보고와 같이 “아산병원 앞 보도블럭정비 설계변경”에 대한 내용이 타당하다 판단되므로, 실정보고 승인 후 설계변경에 반영하고자 합니다.

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.