코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울에너지공사 사장
(경유)
제목	『태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영』사업변경 계획 승인 통보

1. 서울에너지공사 에너지연구소—3188호(’20.10.28.)호와 관련입니다,

2. 귀 공사에서 요청한 『태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영』사업변경 계획과 관련하여 아래와 같이 승인처리하오니, 협약기간 내 태양광 신기술 실증단지가 구축될 수 있도록 공정관리에 철저를기하여 주기기 바랍니다.

*************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

나. 승인조건

1) 예산 사고이월 처리, 정산관리 등 예산 집행관리 철저

2) ’20.11.25일 이전 착공, 동절기 공사 안전성 확보 등 공정관리 철저

3) ’21.2.~ ’21.3월중 태양광 패널 설치 및 모니터링 시범운영 조치

4) ’21년 실증단지 중간평가 및 시범사업에 지장이 없도록 조치.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정인영		햇빛지원팀장	서점숙		녹색에너지과장	11/02 김호성
협조자
시행	녹색에너지과-29184	(		)	접수		(		)
우	12245	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3567	/전송	02-2133-1020	/	jeoiy@seoul.go.kr	/	부분공개(5)