문서번호	공원시설과-4416
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
이병철	최연호	11/02 김인숙

『2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사』

설계변경(1회) 및 준공기한 연기보고

2020. 10.

한강사업본부

(공원시설과)

『2020 한강수영장(몰놀이장) 보수공사』

설계변경(1회) 및 준공기한 연기보고

우리본부에서 시행중인 『2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사』에 대하여 신규공종과 현장여건에 따른 물량 증감을 반영한 설계변경 및 준공기한을 연기하고자 보고 함.

※ 서울시설공단 공사감독1처-7136(2020.10.28.) 호와 관련임

공사개요

○ 공 사 명 : 2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사

○ 위    치 : 수영장(광나루, 뚝섬,  여의도), 물놀이장(양화, 난지)

○ 공사기간 : 2020. 4.29.~ 11.30

○ 총공사비 : 1,503,546,400원

- 도급비 : 1,322,870,400원

- 관급비 :   169,390,000원

- 폐기물 :    11,286,000원

설계변경 내용

○ 예산 변경

구 분		변 경 전	변 경 후	비고(증감)
총 공 사 비		1,503,546,400	1,526,930,000	증) 23,383,600
도급비	공급가액	1,202,609,455	1,250,936,364	증) 48,326,909
	부가가치세	120,260,945	125,093,636	증) 4,832,691
	소 계	1,322,870,400	1,376,030,000	증) 53,159,600
관 급 비		169,390,000	127,910,000	감) 41,480,000
폐 기 물		11,286,000	22,990,000	증) 11,704,000

○ 주요변경내용 : 별도첨부

- 현장 실정보고에 따른 신규대가 내역 반영

․신축이음 설치등 49개 신규대가(토목25,기계24)

- 공종별 현장 조사 및 실정보고에 따른 수량변경

․수성페인트 칠 등 42개 공종 물량변경 발생(토목32, 기계10)

- 공사물량변경에 따른 폐기물량 변경

- 기타 보험료등 재경비 요율에 따른 계상

○ 기간변경

- 수영장(물놀이장) 유지보수공사

․당초 : 2020. 4. 29. ～ 11. 30

․변경 : 2020. 4. 29. ～ 12. 31

- 폐기물 처리용역

․당초 : 2020. 4. 23. ～ 11. 30

․변경 : 2020. 4. 23. ～ 12. 31

- 변경사유 : 수영장 추가공사로 인한 절대공기 부족

․난지물놀이장 목재데크 제거 및 화강판석 포장, 여의도수영장 타일제거 및 방수방식 등

○ 예산과목

- 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 한강공원 수영장            유지관리, 시설비

조치의견

○ 위와 같이 신규공정과 현장여건에 따른 물량증감을 반영한 설계변경 및 준공기한 연기를 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 관련 서류 1부.

2. 준공기한 연기관련서류 1부.  끝.