투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	새남터보행육교개선공사 현장대리인홍현소
(경유)
제목	철거공사 수량추가 외 4건에 대한 실정보고 승인

1. 삼양새남터 제2020-13(2020.10.29.)호와 관련입니다.

2.『새남터 보행육교 개선공사』와 관련하여 철거공사 외 4건에  대하여 아래와 같이 승인 하오니 향후 설계변경 시 반영 하시기 바랍니다.

가. 철거 공사 수량 추가 반영분

나. 보행 안전도우미 및 교통통제 누락

다. 난간 기초확장 설치 시공변경

라. 계측기 설치

마. 폐기물처리비 - 누락.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	정창수		기반시설과장	11/03 라철흠
협조자
시행	기반시설과-4228	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개