문서번호	급수운영과-16885
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김희철	양재덕	11/03 한희선
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「잠실동 외 11개동 상수도공사」 현장실정보고

2020. 11.

급수운영과

「잠실동 외 11개동 상수도공사」

현장실정보고

「잠실동 외 11개동 상수도공사」와 관련하여 집하장 및 사토장 신고서가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

상수도공사 현황

○ 공 사 명: 잠실동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D=15〜300㎜, L=987m

○ 공사기간: 2020. 6. 17.~2021. 6. 30.

○ 계약금액: 641,372,490원

○ 도 급 자: 유에이환경테크(주) 대표 장일웅

※ 실정보고(집하장 및 사토장 신고서 제출)-급수운영과-16807(2020.11.2.)

Ⅱ		보 고 내 용

중간 집하장 변경

○ 당초 송파구 마천동 63-1을 기준으로 설계하였으나, 해당 부지 및 3km 이내는 도심지는 집하장 및 사토장으로 이용이 불가하기에, 경기도 하남시 감일동 194-1번지에 중간집하장 부지를 선정하였으며, 이에 따른 부지임대료 및 중간집하장까지의 운반비를 변경코자 함

(운반거리 3km → 5km로 변경)

사토장 변경

○ 당초 토석정보시스템을 이용하여 경기도 이천시 백사면 도지리 541번지를 사토장으로 설계하였으나, 현재 사토장으로 이용 불가하기에 서울 근교인 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산 39-8(재해지 산지복구현장)으로 변경하고 운반거리 변경에 따른 운반비를 변경코자 함

(운반거리 47.9km → 31km)

Ⅲ		조치계획

상기와 같이 사항을 설계변경에 반영하고 중간집하장 및 사토장을 변경시공토록 계약업체에 통보코자 합니다.

붙임  공사 실정보고 1부(별첨).   끝.