문서번호	기반시설과-4222
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		라철흠	11/03 代양돈욱
협조

『2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사』

재난기금 사용에 따른 실정보고

2020. 11

한강사업본부

(기반시설과)

『2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사』

재난기금 사용에 따른 실정보고

『2020년 진출입시설 유지보수 공사』와 관련하여 한강침수 시 파손된 시설물에 대하여 재난기금으로 보수 하여 시민의 안전과 편의를 제공하고자 함

□ 공사개요

❍ 위    치 : 2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

❍ 사업기간 : 2020. 3. ～ 2020. 11.

❍ 계약금액 : 350,000천원

❍ 계약상대자: 단야공영㈜ 대표 김은숙

❍ 공사규모

- 진출입시설: 데크보수 118㎡, 조류방지망 483㎡, 철재면 도장 130㎡, 오일스텐 도장 1,610㎡, 가드레일정비 150경간 등

- 피아노물길 석재판 보수 15㎡

□ 실정보고 사유

❍ 관련근거

- 한강 침수로 인한 석재판이 파손되어 재난관리기금 신청

❍ 검토내용: 석재판 파손 보수(34,000천원)

- 난지지구 거울분수: 39㎡, 26,124천원

- 여의도지구 물빛분수: 13㎡ 7,876천원

❍ 현황사진

난지 거울분수 석재판 파손	여의도 물빛광장 석재판 파손

❍ 공사비 변경 검토

-  주요수량 변경현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증.감
석재판 보수	0.8×0.8	㎡	-	39	+39	거울분수
석재판 보수	1.0×0.5	㎡	-	13	+13	물빛광장

- 공사비 증․감 내역

단위 : 천원

구 분	당 초	변 경	증 . 감	비고
직접공사비	-	214,821	증23,494
제 경 비	-	81,079	증10,506
도급공사비	-	295,900	증34,000

※ 적용단가 협의율=(낙찰율86.745%+100%)/2 = 93.372% 적용

□ 예    산: 34,000천원

❍ 소요예산: 기 배정된 재난관리기금 34,000천원

□ 검토의견

❍ 당초 설계에 미 반영 되었으며, 한강침수로 파손된 석재판로 인해 시민불편 및 안전사고 방지를 위하여 석재판을 보수하고자 하며 발주처에서 시공사에게 설치 요구한 사항으로  협의율 = (낙찰율 86.745%+100%)/2 = 93.372% 적용으로 산출한 공사비 34,000천원은 추후 설계변경에 반영함이 타당할 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍ 석재판 보수건에 대하여 작업지시하고 향후 설계변경(협의율 반영)시 반영하고자 함.

붙  임 : 개략공사비 1부. 끝.