문서번호	박물관과-12045
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	11/03 이성은
협조

『삼청각 별채 리모델링』

공사 착수회의 결과 보고

2020.  10.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 별채 리모델링』

공사 착수회의 결과 보고

삼청각 별채 리모델링 공사 착공 전 착수회의(Kick-off Meeting)를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 회의개요

○ 일    시 : ’20. 10. 29.(목) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 성북구 대사관로 3 삼청각 현장 운영사무실

○ 참석대상 : 총 11명

**********************************

************************************

****************************************

********************************

**********************************************

○ 주요내용

- 삼청각 별채 리모델링 설계 및 공사내용 설명

- 각 별채 별 현장안전관리 대책 및 주요 공정계획

- 현장확인 및 공사 관련 질의 응답, 토론

○ 회의순서

□ 회의내용

○ 발주처 요청 사항

- 공사 수행 중 화재예방, 감전 등 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기하여 책임관리 요함

- 설계상 오류 및 현장 여건 변동 등 문제점 발견시 각 주체간 협조체계 구축하여 공사가 원활히 추진되도록 노력 요함

- 주간 공정회의 실시 등을 통해 공정지연이 발생하지 않도록 공정 관리 필요

○ 유지관리부서(세종문화회관) 요청 사항

- 별채 누수 부위 지붕 기와 보수 필요

- 관리 운영상 각 별채에 부속실 및 싱크대 등 반영 검토 요청

○ 시공자 요청 사항

- 휴일 작업 계획 제출하여 승인후 작업할 수 있도록 협조 요청(필요시)

- 현장 가설 사무실 위치 결정을 위해 장소 협조 필요(유지관리부서)

□ 향후 일정

○ ’20. 11.              철거공사

○ ’20. 12. ~ ’21. 2.   내·외부 마감공사

○ ’21.  3.              공사 준공.  끝.