문서번호	설비부-16982
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	11/03 이달영

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』관련, 서울시설공단 요청사항 및 설계 보완을 위한 실정보고 내용을 검토하고 보고 드림

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사규모 : 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km(방음터널 1.37km)

❍ 공사기간 : 2017.04.26. ~ 2020.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,926백만원

❍ 감 리 단 : 동부엔지니어링주식회사

❍ 시 공 사 : ㈜제일정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 방재시설 추가 설치 검토보고[설비부-17666호(2019.11.11.)]

❍ 합동점검 결과 보완요청 제출[도로시설처-9821호(2020.7.7.)]

❍ 광전송장비 실정보고 검토보고[설비부-15142호(2020.10.6.)]

❍ 동부간선도로(3공구) 실정보고[동삼감-제2020-283호(2020.9.25.)]

실정보고 주요내용

1) 동부간선도로(2~3공구) 시설물 통합 관리를 위한 광케이블 포설

❍ 변경사유

- 서울시설공단 협의사항으로 동부간선도로(3공구) 시설물을 장암전기실에서 정보관리 후, 도봉지하차도 관리사무소에서 통합관리하기 위해 동부간선도로 (2공구) 접속점까지 광케이블 포설이 필요함

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액	비 고
광케이블 신설	SM 16C	******	*****	************** ************** **************** ****************

❍ 설치위치

2) 방음터널 수배전반(2개소) 감시용 CCTV(영상감시장치) 설치

❍ 변경사유

- 서울시설공단 합동점검 결과 보완요청 사항으로 수락고가차도 하부에 설치된 방음터널 수배전반(2개소) 감시용 CCTV 설비 설치 요청하였고,

- 옥외 전기실의 화재 감지 및 출입자 감시를 위해 CCTV 설비 구성 필요함

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액	비 고
영상감시장치 신설	고정형	***	****	****

❍ 설치위치

3) 교통관제센터 데이터 전송 방식(아날로그→디지털) 변경

❍ 변경사유

- 설계누락분 반영과 서울시설공단 협의사항으로 광케이블 이상 발생 시 도봉지하차도 통신장비가 모두 정지되는 것을 방지하기 위하여 지자기검지기, VMS, CCTV 장비별 각각 회선 분리하여 6코어 구성 요청하였고,

- 교통관제센터에서 테스트한 결과, 신호 불안정으로 사용 가능한 회선이 없으므로 기 연결된 3공구 VDS의 데이터 전송방식을 아날로그에서 디지털로 변경

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액	비 고
영상검지기 제어함체 교체	디지털	**	*****	********* *********

4) VMS(도로전광표지판) 설치 위치 변경

❍ 변경사유

- 도로전광표지판 설치를 위한 현장조사 결과 지하 매설물(한전선로)로 인하여 해당 위치에 기초 설치가 불가능하여 현장 여건 반영하여 설치 가능한 위치로 구조물 위치 변경

❍ 주요 변경현황

품 명	규 격	수 량	개략금액	비 고
도로전광표지판 배관·배선	관로굴착 외	***	****	****** ****

❍ 설치위치

당 초	변 경

개략 공사비 증감 현황                                (단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
도급비	직접공사비	-	******	******
	간접공사비	-	******	******	제경비 포함
	부가가치세	-	******	******
	합 계	-	*******	*******
관급자재		-	******	******
총공사비		-	*******	*******

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 시공사 실정보고를 검토한 결과 관련법령 및 산출기준에 맞게 적정하게 산출된 것으로 판단되고, 추후 도봉지하차도 운영관리체계와 시스템 통합할 수 있도록 인프라 구축함이 타당하다고 판단됨

❍ 영상검지기(디지털방식)을 구현하기 위한 설계도서와 수량 및 단가 적용이 타당하며 현장설비는 도급공사에 반영하고 센터설비는 관급자재로 분리발주함이 타당하다고 사료됨

❍ 방재설비 기초 공사 중 지하매설물로 인하여 설치가 불가한 것으로 판단되어 설치 위치를 변경함이 타당하다고 판단됨

3		조치계획

보고자 검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 설계변경 시 설계변경 소위원회의 의견을 반영하여 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함.