투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	동북선 도시철도 민간투자사업(1,2공구) 공정회의 협조사항 통보

1. 도시철도사업부-10628.‘20.10.28.호와 관련입니다.

2. 동북선1,2공구 도시철도 건설공사의 효율적인 공정관리 위한 공정회의 및 현장점검을

실시하고 본부 협조사항을 아래와 같이 통보하오니 공정추진에 차질없이 만전을 기하여

주시기 바랍니다.

□ 협조사항

1) 지장물 이설 협의 착공전 완료 조치(사업단, 감리단, 시공사)

- 2020년 1월 착공시 까지

2) 전 분야(토공, 구조물 등) 예정공정표 세부 검토 작성 보고

3) 공사안전관리(안전사고 예방) 철저 교육 실시

※ 본부 방침 : 2020년 안전을 최우선으로 하는 안전하고 품질 높은 현장관리계획 참조

4) 공사 민원관리 철저(소음, 진동, 미세먼지 저감에 대한 방지 등)

붙임 : 안전관련 참고사항 각1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	동북선도시철도(주)대표이사 김영두귀하,동북선1공구 건설사업관리다장 박창수귀하,동북선2공구 건설사업관리단장 임용진귀하
주무관	김동일		동북선2과장	전결 10/30 김현기
협조자
시행	도시철도사업부-10644	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도사업부 신교통2과	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7151	/전송	02-772-7305	/	woka5@seoul.go.kr	/	대시민공개